아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(1처리장 최종침전지 스컴스키머 구매설치)

1. 시설보수과-682(2023.02.20.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진 중인「1처리장 최종침전지 스컴스키머 구매설치」사업의 변경계약을 다음과 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 1처리장 최종침전지 스컴스키머 구매설치

나. 계약금액 : 금281,466,000원(금이억팔천일백사십육만육천원)

다. 업 체 명 : 중증장애인생산품우선구매사업단

라. 준공기한 : 2023.02.28.

마. 변경내역

구 분	변경 전	변경 후	비고
계약금액	281,466,000원	271,821,000원	(감) 9,645,000원
계약기간	2022.08.22. ~ 2023.02.28.	좌 동	-

붙  임 : 1. 정산보고서 1부

2. 합의각서 1부

3. 정산요청서 1부

4. 설계내역서(변경) 1부

5. 산업안전보건비 사용내역서 1부

6. 정산요청 공문(중증장애인생산품우선구매사업단) 1부.  끝.

	시 설 보 수 과 장
주무관	배준희		시설팀장	김정선		시설보수과장	02/20
조선행
협조자
시행	시설보수과-685	(	2023. 2. 20.	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8581	/전송	02-300-8544	/	qmwem3231@seoul.go.kr	/	부분공개(5)