문서번호	현장민원과-2741
결재일자	2023. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	현장민원팀장	현장민원과장	남부수도사업소장
표창구	서원익	임인택	02/21
			김분숙
협 조
	행정지원과장		홍기관
	요금과장		조기동
	급수운영과장		代서규석
	시설관리과장		조임남

2023년도 수도계량기 교체 및 수불관리 계획

2023. 02.

남부수도사업소

(현장민원과)

2023년도 수도계량기 교체 및 수불관리 계획

만기가 도래한 수도계량기의 적기 교체 및 고장 계량기의 신속한 교체로 정확한 수돗물 사용량을 계측하여 대시민 신뢰성 제고와 유수율 향상에 기여코자 함

Ⅰ		추진방향

□  법정유효기간(8년) 도래 수도계량기 적기 교체

□  신속한 고장 수도계량기 교체로 유수율 향상

□  검침불편, 교체장애수전 정비를 통하여 작업환경 개선

Ⅱ		일반현황

□ 교체업무 구분

○ 관련근거

- 계량에 관한 법률 제24조 및 같은 법 시행령 제22조

□ 검정 유효기간 : 소형(50mm이하) 8년, 대형(50mm초과) 6년

- 수도계량기 점검 및 교체사무 대행 협약서 제2조

□ 만기·동파·폐전 등 수도계량기 교체에 관한 업무

수도사업소(교체인력 3명)	서울시설공단(교체인력 9명)
○ 소형계량기 고장·검정 교체	○ 소형계량기 만기·동파 교체
○ 만기·동파 교체대상 결과 확인 및 관리	○ 소형계량기 폐전철거
○ 교체불가 계량기 원인파악 및 조치	○ 계량기 교체관련 부대업무
○ 소형계량기 교체업무 지도·감독

※ 50mm초과 대형계량기 교체업무 : 수도자재관리센터

□ 수전현황 및 교체실적

○ 수전현황 (2023.1.31. 기준)

(단위 : 개)

계	소 형							대 형
	소계	15㎜	20㎜	25㎜	32㎜	40㎜	50㎜	75㎜ 이상
340,820	326,025	271,977	20,907	16,565	12,133	6,022	1,971	11,245
	(95.66%)	(79.80%)	(6.13%)	(4.86%)	(3.56%)	(1.77%)	(0.58%)	(3.30% )

○ 최근 3년간 교체 및 폐전철거 실적

(단위 : 개)

구 분	목표량	교체실적 (추진율)	만기교체	고장교체 (일반교체포함)	폐전철거
2020년	34,489	31,119 (90%)	25,090	3,511	2,518
2021년	35,792	35,006 (98%)	26,468	5,967	2,571
2022년	45,999	31,309 (68%)	24,740	3,872	2,697

Ⅲ		수도계량기 교체 계획

□ 2023년 교체목표 : 38,805개

○ 교체대상 : 51,563개 [2023년말 기준 만기도래(경과) 대상]

○ 목 표 량 : 38,805개 [2022 ~ 2023년 만기도래(경과) 대상]

- 연평균 : 폐전철거 2,500개, 고장교체 4,000개 발생

- 매월 만기 교체 목표량 : 32,305개 ÷ 9개월(3~11월) ≒ 3,600개

※ 교체목표량은 '23년 38,805개로 '22년 45,999개 대비 7,194개(15.6%) 감소

※ 예측이 어려운 고장, 폐전, 동파 및 원격전환 수량을 교체실적에 포함

□ 만기 계량기 교체 (서울시설공단 대행)

○ 교체대상 : 2023년말 기준 만기도래(경과) 수도계량기

○ 업무처리절차

① 만기작업지시 (교체대상 생성)	➠	② 만기물량배분 (교체원 지정)	➠	③ 만기교체작업 (현장 교체)	➠	④ 작업결과처리 (PDA입력‧통보)
현장민원과		서울시설공단		서울시설공단		서울시설공단

➠	⑤ 교체결과확인 (전산입력 현행화)	➠	⑥ 교체장애 (통보)	➠	⑦ 교체장애정비 (서울시 귀책)
	현장민원과		현장민원과		급수운영,시설관리과

□ 폐전 계량기 철거 (서울시설공단 대행)

○ 철거대상 : 수용가 폐전신청한 소형 수도계량기

○ 처리기간 : 접수일로부터 3일 이내 (필요시 즉시 처리)

○ 업무처리절차

① 폐전민원접수	➠	② 인입관폐쇄 (공사부서 의뢰)	➠	③ 계량기철거 (현장민원과 의뢰)	➠	④ 폐전작업지시
행정지원과, 요금과		요금과		요금과		현장민원과

➠	⑤ 폐전물량배분 (교체원 지정)	➠	⑥ 폐전, 플러그설치 (현장작업)	➠	⑦ 작업결과통보	➠	⑧ 폐전결과확인 (전산입력 현행화)
	서울시설공단		서울시설공단		서울시설공단		현장민원과

□ 고장 계량기 교체 (사업소 직원 교체)

○ 교체대상 : 회전불량, 회전멈춤, 몸통누수 등 고장난 소형 수도계량기

○ 처리기간 : 접수일로부터 3일 이내 (필요시 즉시 처리)

○ 업무처리절차

① 계량기검침 (상태확인)	➠	② 교체의뢰 (고장계량기)	➠	③ 작업지시 (현장교체)	➠	④ 교체작업 (주소 및 기물번호 확인)
서울시설공단		요금과		현장민원과		현장민원과

➠	⑤ 처리결과 (전산입력)
	현장민원과

□ 디지털 계량기 교체

○ 원격검침시스템 구축사업 추진에 따른 디지털 계량기 교체(검침단말기 포함)

○ 연도별 소형 디지털 계량기 교체(신설) 추진실적

(단위 : 개)

구 분	계	2022년	2021년	2020년
설치건수	13,605	806	12,369	430

※ 대형 수도계량기(65~250mm)는 수도자재관리센터에서 별도 교체

○ 추진기간  : 2023. 3월 ~ 10월

○ 교체(설치)대상(50mm이하) : 검침불편 수전 등 교체대상

- 교체요구 대상 : 112개 (`'23.02.20일 기준 교체요구 등록현황)

※ 본부 추진계획에 의거 원격검침시스템 구축(현장여건에 따라 수량변경 가능)

○ 업무 기능별 부서간 협력 추진

추진부서	부서별 추진사항
계측관리과	원격검침시스템 사업추진 총괄 및 용역비 재배정
현장민원과	원격검침시스템 설치대상 선정, 계량기 교체(신설) 작업, 단말기 설치 및 유지관리
공사부서	교체장애수전 원격검침 전환요청시 디지털계량기로 교체
서울시설공단	검침불편 등을 원격검침 전환요청시 디지털계량기로 교체
요 금 과	원격검침시스템 구축후 설치상태 확인(누수 등) 및 수신 상황 모니터링

□ 겨울철 동파계량기 교체 (서울시설공단 대행)

○ 교체대상 : 동절기 발생한 동파된 소형 수도계량기

※ 수도계량기 보온 미실시로 계량기 동파시 확인서 징구후 변상금 부과

○ 처리기간 : 접수일로부터 3일 이내 (필요시 즉시 처리)

○ 업무처리절차

① 동파민원접수 (민원, 검침동파)	➠	② 동파작업지시	➠	③ 동파물량배분 (교체원 지정)	➠	④ 동파교체작업 (현장 교체)
행정지원과(민원), 요금과(검침)		현장민원과		서울시설공단		서울시설공단

➠	⑤ 작업결과처리 (자료정리‧통보)	➠	⑥ 교체결과확인 (전산입력 현행화)
	서울시설공단		현장민원과

Ⅳ		수도계량기 수불관리 계획

□ 공통사항

○ 수불은 선입선출 원칙하에 관리(담당자 지정 운영)

○ 수도계량기 및 부속자재 운반·보관·설치 시 훼손이나 변형이 발생하지 않도록 주의 및 분실이나 훼손 시 변상조치

□ 수도계량기 및 부속자재 수불관리

○ 만기, 고장 등에 소요되는 수도계량기 및 부속자재 수령․출고

※ 보관장소 협소로 약 1개월 소요량 수령· 비축

○ 수도계량기 및 부속자재 입· 출고 즉시 자재관리시스템 입력·관리

Ⅴ		행정사항

□ 현장민원과 : 소형계량기 교체 및 전산입력 현행화

○ 소형계량기 교체(고장·검정 계량기) 및 서울시설공단 교체업무 지도·감독(만기·동파 계량기 교체 및 폐전철거 등)

○ 교체장애수전 귀책 사유 확인 및 조치 의뢰

○ 소형계량기, 부속자재 수불관리 (작업내역 전산입력 현행화)

□ 공사부서(급수운영과, 시설관리과) : 장애수전 정비 등 협조

○ 교체장애가 서울시 귀책일 경우 공사부서에서 장애수전 해소

※ 교체장애수전 원격검침 전환요청시 디지털계량기 교체

□ 시설관리과 : 계량기 교체중 누수발생시 긴급 복구지원 협조

□ 서울시설공단 : 소형수도계량기 교체업무 철저

○ 계량기 교체관련 업무(만기·동파 계량기 교체 및 폐전철거 등) 철저

○ 검침위험 등을 원격검침 전환요청 시 디지털계량기로 교체

□ 요금과 : 원격검침시스템 정상 작동여부 확인

○ 원격검침시스템 설치상태 확인(누수 등)

○ 원격검침시스템 수신 상황 모니터링

붙임  2023년 수도계량기 교체 계획(계측관리과 방침서) 1부.  끝.