문서번호	치수안전과-3585
결재일자	2023. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수총괄팀장	치수안전과장		물순환안전국장
이동섭	김지환	최연호		02/21
				권완택
협 조
	주무관		조중환

2023년 수방 관측장비(도로수위계) 설치계획

2023. 02.

물순환안전국

(치수안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	안전분야
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 수방 관측장비(도로수위계) 설치계획

침수 취약지역을 중심으로 수방 관측장비(도로수위계)를 확충하여 강우 시 도로의 수위 정보 실시간 파악을 통한 사전 예·경보 실시로 침수피해 예방 및 시민안전 확보 등 수방 대응능력을 강화하고자 함.

Ⅰ		추진근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제4조(국가 등의 책무)

- 재난 및 각종 사고를 예방하고 피해를 줄이기 위한 지자체의 노력 의무

○ 이상폭우 대비 풍수해 종합안전대책(시장방침 제193호, ‘22.10.20.)

- ***************************

Ⅱ		서울시 도로수위계 현황

○ 설치기간 : 2020년 ~ 2022년

○ 운영개소 : 13개 자치구 48개소 운영 중

○ 활용내용 : 웹 및 모바일로 도로 수위정보 실시간 모니터링

구 분	계	‘20년	‘21년	‘22년
개 소 수	48개소	6	12	30
		양천(2),서초(4)	은평(1),마포(4),동작(2),서초(4),강남(1)	중구(2),광진(3),서대문(5),강서(1),구로(4),금천(5),서초(5),강남(2),강동(3)
**** *****	***	**	***	***

<강남역>	<가산디지털로>	<사당역>

Ⅲ		2023년 사업 추진계획

□ 추진방향

○ 내수침수 예상지역 중심 도로수위계 확충으로 촘촘한 수해안전망 구축

□ 대상지 선정

○ 이래 선정기준 적합지역 중 우선순위 상위 지역

- **************************

- **********************

- *********************

○ 선정결과 : **** (첨부 대상지 세부현황 참조)

자치구	개소	자치구	개소	자치구	개소	자치구	개소	자치구	개소
종로	*	동대문	*	노원	*	강서	*	관악	*
중구	*	중랑	*	은평	*	구로	*	서초	*
용산	*	성북	*	서대문	*	금천	*	강남	*
성동	*	강북	*	마포	*	영등포	*	송파	*
광진	*	도봉	*	양천	*	동작	*	강동	*

※ 상기 대상지는 추후 자치구별 현장 확인 및 설치 과정에서 세부 위치 및 수량은 변경될 수 있음.

□ 설치위치 선정시 착안사항

○ 내수침수 지역내에서 종단경사 및 횡단경사가 심하지 않는 곳

○ 설치위치 주변에 빗물받이 등이 설치된 지점 등

□ 소요예산 : ******

○ 산출근거 : *******************************

- 장치 구성 : 수위계측센서, IoT모뎀, 함체, 전기·통신시설 등

○ 예산현황

(단위:천원)

*	********	****************
*******	*******	*******

□ 사업 추진절차

○ 서울시 선정 대상지역을 기준으로 현장 여건 등 자치구 실정에 맞게 설치 및 관리

대상지 안내 및 예산 재배정 (시→구)	⇒	현장 확인 및 설치위치 확정 (자치구)	⇒	발주 및 계약 (자치구)	⇒	설치완료 통보 (구→시)	⇒	도로수위계 운영·활용 (시, 구)
‘23.2월중		‘23.2월말		‘23.3월중		‘23.4월말		‘23.5~10월

Ⅳ		행정사항

○ 자치구 예산 재배정(‘23.2월)

(단위:백만원)

자치구	예산액	자치구	예산액	자치구	예산액	자치구	예산액	자치구	예산액
종로	**	동대문	**	노원	**	강서	**	관악	**
중구	**	중랑	**	은평	**	구로	**	서초	**
용산	**	성북	**	서대문	**	금천	**	강남	**
성동	**	강북	**	마포	**	영등포	**	송파	**
광진	**	도봉	**	양천	**	동작	**	강동	**

- 예산과목

· (일반) 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 수방 관측장비 설치, 시설비

· (특교) 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 호우피해 응급복구, 시설비

○ 자치구별 도로수위계 설치(‘23.3~4월)

- 자치구별 사전 현장 점검을 통한 설치 가능유무 판단 및 위치 확정

- 사업완료 후 설치결과 제출(자치구 → 치수안전과)

○ 도로수위계 운영 및 활용(‘23.5~10월)

- 인터넷 및 모바일 환경 실시간 도로수위 모니터링

- 침수 예·경보 기준에 따른 도로 수위정보 푸쉬 알림

- 침수예측 시물레이션 정보에 대한 검증 활용 등

붙 임 : 도로수위계 설치 대상지(안) 세부현황 1부. 끝.