문서번호	도로보수과-1849
결재일자	2023. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
박정길		신준식	02/21
			임대운
협조
	주무관		송광석

2023년 맨홀 유지관리 계획

2023. 2.

동부도로사업소

(도로보수과)

2023년 맨홀 유지관리 계획

맨홀의 구조안전성을 확보하고 차도의 평탄성을 향상시켜 시민이 도로를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 맨홀 유지관리 계획을 수립하여 시행코자 함.

1		관련근거

○ 도로상 작업구 설치 및 관리 지침(국토교통부 지침 제17호, 2015.9.1.)

○ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(서울특별시, 2020.2.3.)

○ '23년 도로포장 정비 추진계획 및 예산 재배정 알림(도로관리과-359,2023.1.6.)

- 예산재배정 : 금1,054백만원(도급비 1,039, 이전비 15)

○ 맨홀 정비공사 계약심의 관련서류 제출 요청(도로관리과-1246,2023.1.17.)

- 맨홀관리계획 및 점검계획 수립

○ '23년 포장도로 유지관리사업 추진계획(도로보수과-998,2023.1.30.)

- 불량맨홀정비공사 기본뱡향 및 예산집행 계획 수립

2		현황

○ 맨홀 관리현황                                        (단위 : 개소)

계	상수도	하수도	통신	전기	가스	난방	소화전	기타
14,664	4,904	3,565	3,559	1,403	805	241	83	104

※ 특별시도 맨홀외부상태 조사 평가용역(도로관리과) 중으로 '22년 기준 시스템 자료 사용

○ 특별시도 맨홀외부상태 조사 평가용역 자료

○ 불량맨홀 정비현황                                    (단위 : 개소)

계	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7,365	918	758	944	1,079	1,056	938	885	769	18

※ 2022년 : 계약 지연 등으로 인접사업소(남부)에 공사 요청

3		맨홀 관리계획

□ 추진방향

○ 맨홀점검 : 정기적인 맨홀 점검으로 불량맨홀 적기 정비

○ 불량맨홀 정비 : 신속한 불량맨홀 정비로 도로평탄성 확보

□ 맨홀 점검

○ 점검대상 : 사업소 관리노선(시도), 14,664개

○ 점검주기

- 정기점검 : 상·하반기 각각 1회 점검 시행(2회)

- 수시점검 : 평시 순찰 및 해방기, 우기, 겨울철 대비 등 점검 시행

○ 점검방법 : 외관상태 육안점검

- 맨홀 뚜껑 균열, 단차, 이탈 등

- 맨홀 주변 포장 손상 및 평탄성 등

○ 점검자 및 점검노선 : 점검조 편성(2인1조, 노선담당별 점검 시행)

점검조	점검자	점검노선
1조	*** ***	영동대로, 압구정로, 도산대로, 학동로, 광평로, 양재대로, 천호대로, 강동대로, 상일로, 잠실철교, 구천면로, 상암로, 고덕로
2조	*** ***	남부순환로, 도곡로, 삼전로, 밤고개로, 헌릉로(연결도로), 백제고분로, 송파대로, 동남로, 위례중앙로, 탄천동로, 동부간선연결로, 자곡로, 새말로
3조	*** ***	언주로, 봉은사로, 테헤란로, 역삼로, 강남병원뒷길, 논현로, 삼성로, 올림픽로, 아리수로, 위례성대로, 신천로, 오금로, 중대로, 양산로, 위례서로

○ 조치계획

- 경미한 사항은 직영반에서 조치 후 불량맨홀 정비공사 시행

- 맨홀 구체 및 뚜껑 파손은 맨홀 관리기관에 조치 요청 후 협의하여 불량맨홀 정비공사 시행

- 불량맨홀 정비는 『관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)』업체에 작업지시하여 조치

□ '23년 불량맨홀 정비 계획

○ 공사 현황

사업명	공사기간	소요예산	정비대상	비고
2022년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사	2022.11.4. ~ 2023.12.24.	936백만원	470개소	명시 이월
2023년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사	2023.3. ~ 12.	1,039백만원	470개소	발주 예정

○ 정비기준 및 내용

- 도로순찰 및 민원발생 등에 따른 긴급정비 필요 맨홀 및 '21년 및 '22년 노후포장정비공사에서 발생된 불량맨홀 미정비분 250개소 우선 정비

- 맨홀 정비 우선 순위 : '22년 기준(1,172개소, 라급) , '23년 기준(37개소, E급)

※ 특별시도 도로상 맨홀외부상태 조사 평가 용역 기준 : 동부(2,158개소, D·E급)

- 맨홀뚜껑 파손(소음, 균열 등) 및 구체 파손 맨홀 관리기관 정비 유도

4		향 후 계 획

□ '22년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사

○ '23. 2. ~ 6. : 불량맨홀 정비공사 공사

○ '23. 6. 30. : 불량맨홀 정비공사 준공

□ '23년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사

○ '23. 3. : 불량맨홀 정비공사 발주

○ '23. 4. : 불량맨홀 정비공사 계약 및 착공

○ '23. 12. 26. : 불량맨홀 정비공사 준공

5		행정사항

○ 맨홀 관리기관에 2023년 맨홀 관리계획 수립내용 통보

○ 점검계획이 수립된 맨홀 관리기관에 대해서는 조기 점검토록 독려

○ 한정된 예산으로 인해 미정비되는 불량맨홀은 교통사고 예방을 위해 맨홀 관리기관에 통보하여 정비 요청

○ 점검이 완료된 맨홀 관리기관은 점검결과를 도로관리시스템에 조기에 등재토록 하여 공유 관리 등

붙임  1. 2022년·2023년 불량맨홀 정비대상 각1부.

2. 2023년 맨홀 관리계획(관리기관 배부용) 1부.

3. 서울시 도로상 맨홀 정비 및 관리지침 1부.

4. 도로상 작업구 설치 및 관리지침 1부.  끝.