문서번호	치수과-2236		주무관		치수담당		치수과장		건설교통국장
결재일자	2023. 2. 21.		김도연		오강일		김윤기		02/21
공개여부	대시민공개								김석우
방침번호			협조
								하수담당		김정훈
방침번호
				빗물관리담당		정무홍		기전관리담당		유태상

- 2023년 풍수해 안전대책 관련 -

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

2023. 2.

건설교통국

(치   수   과)

- 2023년 풍수해안전대책 관련 -

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

2023년 우기 대비 빗물펌프장 등 수방시설과 재개발, 재건축, 대형공사장 및 축대, 옹벽, 급경사지 등 풍수해 취약지역에 대한 일제점검을 실시하고 우기전까지 정비를 완료하여 수해 대비에 철저를 기하고자 함

Ⅰ	추 진 근 거

□ 수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

(서울시 치수안전과-3167호, 2022.2.15.)

Ⅱ	점 검 대 상

□ 하천, 하수도, 수방시설물 : 치수과

○ 하천 4개소(국가 1, 지방 3) 및 제방시설

○ 빗물펌프장 2개소, 간이 빗물펌프장 2개소, 수문 8개소, 저류조 2개소

○ 하수시설물(하수관로, 하수박스, 맨홀, 빗물받이 등)

○ 하천 및 하수관거내 퇴적물 및 수해유발 적치물 등 유수장애 시설물

□ 풍수해 취약시설 및 지역 : 각 소관부서

○ 민간 공사장 : 재개발·재건축, 대형공사장 및 장기 공사중단 현장 등

○ 공공 공사장 : 도로, 하천, 하수도, 공원, 교통시설 등

○ 사면시설 : 각종 사면, 옹벽, 축대, 절개지, 산사태·낙석 우려지역 등

○ 지하시설물 : 지하주차장, 지하상가 등

○ 돌출시설 : 대형입간판, 돌출간판, 철탑, 그늘막, 각종 표지판 등

○ 기타 각 소관부서별 유지관리하고 있는 시설물 등

Ⅲ	추 진 계 획

□ 점검 및 정비기간 : 2023. 2. 27. ~ 4. 28.

부서 점검계획 수립 (2.23.까지)		1차점검 시행 (2.27.~3.24.)		지적사항 보완조치 (3. 6.~3.24.)		조치결과 제출 (3.29.까지)
[담당부서]		[담당부서]		[담당부서]		[담당부서→치수과]
2차 집중점검 시행 (1차점검 시 미조치 사항 위주) (4.3.~4.21.)		지적사항 정비완료 (4.10.~4.28.)		조치결과 제출 (5.2.까지)		조치결과 수합 및 서울시 제출 (5. 4.)
[담당부서]		[담당부서]		[담당부서→치수과]		[치수과→하천관리과]

□ 점검계획 수립

○ 점검계획

- 각 시설물 및 유지관리 담당 부서별 점검대상 파악(붙임1) 및 자체 계획수립

· 대   상 : 수방시설 및 모든 풍수해 취약시설(지역)

· 점검반 : 해당 분야별 전문가 및 관계 공무원 등으로 구성 및 운영

※ 점검대상(붙임1) 제출 (담당부서 → 치수과)

□ 단계별 점검 및 정비(세부)

○ 1차점검 및 정비

- 점검책임자 : 담당 부서장

- 기  간 : 2023. 2. 27. ~ 3. 24.까지

- 담당 부서장 주관, 전문가와 점검 및 정비

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

※ 부서별 1차 점검 후 지적사항 보완조치하고, 3. 31일까지 치수과로 조치결과(붙임2, 3) 제출

○ 2차 집중점검 및 정비 : 1차점검 시 미조치사항 위주 집중점검

- 점검책임자 : 담당 부서장

- 기  간 : 2023. 4. 3. ~ 4. 21.까지

- 담당 부서장 주관, 전문가 등 합동점검 및 정비 시행

※ 4. 28.까지 1·2차 점검시 지적사항 전체 정비완료 후 5. 2.까지 치수과로 조치결과(붙임2, 3)를 제출하고, 우기전 정비가 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행

Ⅳ	행 정 사 항

○ 상세 일정

- 부서별 점검계획 수립 및 점검대상(붙임1) 제출(담당부서→치수과) - 2. 23.까지

- 1차 지적사항 및 조치결과(붙임2) 제출(담당부서→치수과) -- 2. 29.까지

- 1차 지적사항 및 조치결과 서울시 제출(치수과) ------- 3. 31.까지

- 2차 지적사항 및 조치결과(붙임2) 제출(담당부서→치수과) ---  5. 2.까지

- 2차 지적사항 및 조치결과 서울시 제출(치수과) --------  5. 4.까지

○ 지적사항 조치결과 사진 첨부하여 제출(붙임3)

○ 점검결과 중대한 결함사항 조치

- 구조적 균열, 붕괴, 전도 등 징후가 발견된 경우 응급조치 및 대책을 마련하고,

긴급 상황시 재난관리기금 등을 활용하여 우기 전까지 완료 될 수 있도록 조치

붙 임 : 1. 점검대상 현황(양식) 1부.

2. 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과보고(양식) 1부.

3. 조치결과 사진(양식) 1부.

4. 서울시 수해취약지역 일제점검∙정비계획 1부.  끝.