문서번호	토목부-3229
결재일자	2023. 2. 22.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		이성주	02/22
			이임섭
협조
	주무관		이상현

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

실정보고(스마트 안전기술도입) 검토 보고

2023. 02.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

실정보고(스마트 안전기술도입) 검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 스마트 안전기술도입에 따른 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근    거

○ 보차도교 실정보고(스마트안전기술도입) 승인요청(창동상계 제22-291호, `22.12.27.)

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

○ 규    모 : 보차도교 신설(B=32.0m,  L=118.0m)

○ 총공사비 : ************************************************)

○ 사업기간 : ’21. 04. 19. ∼ ’24. 04. 18.

- 1차 : ‘21. 04. 19.  ~ ’22. 12. 15.***************************

- 2차 : ’22. 12. 16.  ~ ‘23. 12. 15.**************************

○ 시 공 사 : ***************

○ 감 리 사 : ***************

□ 추진경과

○ 2022. 04. 26 : 「중대재해 예방을 위한」스마트 안전기술 도입 시행 안내(총무부-22275)

→ 1단계 추진 대상사업현장 선정

○ 2022. 09. 02 : 스마트 안전기술 추진실적 제출 요청(총무부-30569)

○ 2022. 09. 26 : 스마트 안전기술 도입 시행촉구(총무부-31880)

○ 2022. 11. 11 : 도기본 업무협의 및 담당감독관 교육

→ 스마트 안전관련 방안강구 지시

○ 2022. 11. 16 : 현장내 스마트 안전기술 도입 시행

□ 실정보고 주요내용

○ 현장 작업자의 위치, 공정 파악 등 체계적 관리를 위해 스마트 안전장비

및 안전관리 시스템 구축 ·운영

○ 도입내용

-  스마트 안전모 스피커, 중장비 접근경보 시스템

-  이동형 CCTV, 드론, 안전종합 상황판

스마트 안전모	중장비 접근경보	이동형 CCTV	드 론	안전종합 상황판
비대면 원격 안전 관제 시스템 해당 근로자의 안전모 스피커를 통해 자동 안전방송 인원파악,위험알림 휴대폰 및 스마트 안전장비와 연동 (LTE무선 전송)	근로자 건설장비 접근 시 강력 현장 싸이렌 또는 근로자 안전모에 음성알림 중장비 운전석에는 인디게이터 경보알림 원격관리자 스마트폰과 사무실 상황판TV 에 실시간으로 전송 하여 근로자 안전확인	현장의 사각지대에 이동형CCTV설치 적재적소의 현장 안전관리 모니터링 으로 안전관리 실효성 제고 근로자 단독작업 안전 사고 선제적 예방 스마트폰과 사무실 상황판으로 실시간 영상 전송	현장의 사각지대 촬영 및 기록 항공촬영으로 전체 기록	모든 스마트안전장비 현황을 실시간 모니터링 및 안전종합상황판으로 활용 스마트 안전장비 운영관리 TV상황판 및 관리자용 스마트폰앱 실시간 푸시 알림

□ 수량 증·감 내역

공 종 명	규 격	**	**	**	***	비 고
1). 중장비접근경고
근로자 스마트안전모스피커	충전식	**	*	***	***
중장비 싸이렌,인디게이터,스마트비콘		**	*	**	**
안전모스피커 멀티충전대	16대/세트	***	*	**	**
2). 이동형CCTV
이동형CCTV	보조배터리비용포함	*	*	**	**
드론	매빅MINI2	*	*	**	**
현장 이동형 스피커		*	*	**	**
통신요금	LTE요금	*	*	**	***
3).안전종합상황판
모니터	43인치	*	*	**	**
세톱박스		*	*	**	**
소프트웨어	PC,스마트폰	*	*	**	**
현장설치 및 교육		*	*	**	**
서버운용	클라우드서버,프로그램	*	*	***	***

□ 공사비 내역

○**********************

(단위: 천원)

공 종	규 격	당 초	변 경	증.감	비 고
1). 중장비접근경고
근로자 스마트안전모스피커	충전식	*	*****	*****	****
중장비 싸이렌,인디게이터,스마트비콘		*	*****	*****	****
안전모스피커 멀티충전대	16대/세트	*	***	***	****
2). 이동형CCTV			*	*
이동형CCTV	보조배터리비용포함	*	*****	*****	****
드론	매빅MINI2	*	***	***	****
현장 이동형 스피커		*	***	***	****
통신요금	LTE요금	*	*****	*****	****
3).안전종합상황판			*	*
모니터	43인치	*	***	***	****
세톱박스		*	***	***	****
소프트웨어	PC,스마트폰	*	***	***	****
현장설치 및 교육		*	***	***	****
서버운용	클라우드서버,프로그램	*	*****	*****	****
제 경 비		*	*	*	*
공 급 가 액		*	******	******	*
부 가 가 치 세		*	*****	*****	*
총 공 사 비		*	******	******

※ 안전관리비 정산항목으로 제경비 제외

□ 검토결과 및 조치계획

○ 국토교통부 스마트안전장비 공공의무화 지침(`19.04) 및  건설기술진흥법

개정 시행(`21.09.17)에 따른 건설현장 스마트 안전기술 도입을 반영한

사항으로

○ 안전 사각지대 해소, 근로자 안전사고 선제적 예방, 주요 공종의 기록·관리, 실시간 현장 안전관리 모니터링 등을 통해 안전관리 실효성을 확보하고자

하며 추후 설계변경에 반영 하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고서 1부.끝.