아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	교통안전시설물(노면표지) 원인자부담금공사 변경승인(남부순환로 평탄화 공사)통보

1. 서울특별시도시기반시설본부-토목부-1969(2023.02.02)호와 관련입니다.

2.「남부순환로(개봉1사거리주변)평탄화공사」와 관련하여 교통안전시설물(노면표시)원인자부담공사에 대한 공사물량변경 승인 요청에 대하여 아래와 같이 변경승인 하오니 관련시방기준을 준수하여 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 교통안전시설물(노면표시)원인부담공사 공사사물량변경 요청「남부순환로(개봉1             사거리주변)평탄화공사」

나. 위 치 : 남부순환로 오류IC~매봉초등학교

다. 검토결과 : 공사물량 변경 승인

노면표지 부분(도로보수과)

공 종	업 체 명			설 치 내 용			비고
	설 계	감 리	시 공	공 종	당 초	변 경
노면 표지	㈜동림티앤에스 (변경없음)	㈜동일기술공사외2개사 (변경없음)	㈜지아이엘건설 (변경없음)	●임시차선도색 구분선 융착식(백색) 구분선 융착식(황색) 문자,기호(백색) 횡단보도(백색) 제거 ●영구차선도색 구분선 5종(백색) 구분선 5종(황색) 문자,기호(백색) 횡단보도(백색)	30,209m 32,886m 8,509m 5,056m 39,746m - m - m - m - m	35,659m 21,110m 13,215m 5,392m 49,668m 7,772m 7,980m 3,384m 4,555m

라. 공사물량 변경승인 조건

」1) 준공전 tgis.seoul.go.kr에 시공변경 사항 자료 입력 완료 후 변경

- 공사번호 : 2016-0207-064

2) 공사수행과 관련하여 교통안전시설물(노면표시)에 대한 원인자 비용부담 공사를 승인하오  3) 서울특별시 노면표시 개정 시방규정 적용.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	서효원		도로보수과장	02/22
代최선보
협조자
시행	도로보수과-1799	(	2023. 2. 22.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 도로보수과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-265-7952	/전송	02-2657-7960	/	cvgvsv77@seoul.go.kr	/	대시민공개