문서번호	토목부-3231
결재일자	2023. 2. 22.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		이성주	02/22
			이임섭
협조
	주무관		이상현

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(스마트 안전기술도입) 검토 보고

2023. 02.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(스마트 안전기술도입) 검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 스마트 안전기술도입에 따른 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근    거

○ *****************************************************

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 : 보행교 신설(B=10.0~15.0m,  L=110.5m)

○ 도 급 비 : *********

○ 사업기간 : `21. 04. 19. ∼ `24. 04. 18.

- 1차 : `21. 04. 19.  ~ `22. 12. 02.**************************

- 2차 : `22. 10. 17.  ~ `23. 10. 16.**************************

○ 시 공 사 : *************

○ 감 리 사 : ***************

□ 추진경과

○ `22. 04. 26 : 「중대재해 예방을 위한」스마트 안전기술 도입 시행 안내(총무부-22275)

→ 1단계 추진대상 사업현장 선정

○ `22. 09. 02 : 스마트 안전기술 추진실적 제출 요청(총무부-30569)

○ `22. 09. 26 : 스마트 안전기술 도입 시행촉구(총무부-31880)

○ `22. 11. 11 : 도기본 업무협의 및 담당감독관 교육

→ 스마트 안전관련 방안강구 지시

○ `23. 01. 10 : 현장내 스마트 안전기술 도입 시행

□ 스마트안전기술 도입 내용

○ 현장 작업자의 위치, 공정 파악 등 체계적 관리를 위해 스마트 안전관리

시스템 구축 ·운영

- 도입내용 : 이동형 CCTV, 태양광설비, 안전종합 상황판 ※고정형 CCTV 설계 기반영

이동형 CCTV	고정형CCTV 태양광설비	안전종합 상황판
현장의 사각지대에 이동형CCTV 설치 적재적소의 현장 안전관리 모니터링 으로 안전관리 실효성 제고 근로자 단독작업 안전사고 선제적 예방 스마트폰과 사무실 상황판으로 실시간 영상 전송	고정형 CCTV 상시가동을 위한 전기 공급 전기인입 및 발전기 설치에 비해 경제적	모든 스마트안전장비 현황을 실시간 모니터링 및 안전종합 상황판으로 활용 스마트 안전장비 운영관리 TV상황판 및 관리자용 스마트폰앱 실시간 푸시 알림

- 고정형 CCTV 설치 현황

이동형 CCTV 설치위치	고정형CCTV 태양광설비

- 고정형 CCTV 공사비 검토

****	****	******	***********
****	***** *************	*********** *****	********* *********
****	******************* *****	**************** ************	******************* ********************* **********************
*** ******	*****	*****	*****

□ 수량 증·감 내역

*****	****	***	***	***		***
********	***********************	*	*	*	*
*******		*	**	**	**
********	***********	*	**	**	**

□ 공사비 증·감 내역

○ ********************

(단위: 천원)

***	***	***	***	***		***
********	***********************	-	******	*	******
***		-	*****	**	*****	*
*********		-	******	*	******	*** ****
****		-	******	*	******	*
*****		-	*****	*	*****	*
****		-	******	*	******

□ 신규단가 협의

○ 협 의 일 : `23. 02. 10.(금)

○ 참 석 자 : ****************************

○ 협의결과

공 종	시공사(안)	발주처(안)	적 용
태양광설비 설치	********* ********	************ **	********* ************ ***************
스마트 안전기술 도입	***********************************

□ 검토결과 및 조치계획

○ 국토교통부 스마트안전장비 공공의무화 지침(`19.04) 및  건설기술진흥법

개정 시행(`21.09.17)에 따른 건설현장 스마트 안전기술 도입을 반영한

사항으로

○ 안전 사각지대 해소, 근로자 안전사고 선제적 예방, 주요 공종의 기록·관리, 실시간 현장 안전관리 모니터링 등을 통해 안전관리 실효성을 확보하고자

하며 추후 설계변경에 반영 하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고서 1부.끝.