문서번호	시설관리과-3303
결재일자	2023. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
최지훈	유홍규	문병희	02/22
			代이영세

2023년 상수도관 전식방지

(외부전원 방식) 공사 추진계획

2023. 2.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 상수도관 전식방지

(외부전원 방식) 공사 추진계획

수서동 362-26 1800㎜ 송수관로에 대해 전기방식시설을 설치하여 부식에 따른 누수 사고를 예방하고 관로의 수명을 연장하고자 공사 추진계획을 보고드림

Ⅰ		추진 배경

□ 2023년 상수도관 전식방지공사 추진계획

[본부 시설관리과-28320(2022. 12. 28.)]

□ 전식방지(외부전원 방식) 원리 및 사업대상

❍ 상수도관 자체의 전기 화학적 부식과 누설전류에 의해 부식되는 것을, 외부에서 직류전원을 가하여 방식하기 위한 시설

❍ 대    상 : 상수도관(강관), D=700㎜ 이상

□ 연도별 기 추진실적

구 분	계	`'17년	`'18년	`'19년	`'20년~'22년
대상관로(㎞)	****	*	****	****	*
소요예산(백만원)	***	***	***	***	*

□ 최근 6년간 km당 단가

연 도	'17년	'18년	'19년	'20년~'22년
단가(천원)	***	**	***	*

※ 공사단가는 관로구경, 토지 비저항값(토질, 암반) 등에 따라 변동됨

Ⅱ		공사 개요

□ 대상 관로

소재지	방식 관로	관 연식	방식법
**********	*****************	*****	******************************

□ 공사 기간 : 2023. 2.~12.

□ 소요 예산 : **********

❍ 전식방지 공사 : **********

- 이전비(폐기물 처리비, 도로굴착 복구비 등) 약 ************

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 상수도관 전식방지(22103), 시설비및부대비, 시설비(401-01)

❍ 감리 용역 : *********

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 상수도관 전식방지(22103), 시설비및부대비, 감리비(401-02)

□ 사업 규모

❍ 전식방지공사

- 도로굴착 : 차도 100m(서울시설공단), 보도 70m(구청 도로관리과)

- 양극 설치 : 3개(심도 30m)

- 양극선, 음극선, 측정인출선 포설

- 정류기제어함 설치(한전 인입 공사, 접지공사)

- 도로굴착 관리청 복구 혹은 원인자 직접복구

- 폐기물 처리 : 기준 물량은 공사업체 처리하고, 초과 시, 급수운영과 폐기물 처리 용역 위탁 혹은 분할 발주

❍ 감리용역: 시공관리, 품질관리, 안전관리

□ 계약방법

❍ 전식방지공사 : 제한경쟁입찰

- 입찰참가자격 : 전기공사업법 제4조에 의거, 전기공사업 등록업체로서 입찰공고일 전일부터 계약체결일까지 본점 소재지가 서울시에 소재한 업체

- 관련 근거 : 지방계약법 시행령 제20조 1항 6조

❍ 감리용역 : 제한경쟁입찰

- 입찰참가자격 : 전력기술관리법 제14조 및 동법시행령 제27조 규정에 의한 전력시설물의 감리업(전문감리) 또는 감리업(종합감리) 등록업체로서, 입찰공고일 전일부터 계약체결일까지, 법인 등기부 상 본점(개인사업자의 경우 해당 사업에 관한 사업자등록증이나 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등 관련 서류의 사업장)이 서울시에 소재한 업체

- 관련 근거 : 지방계약법 시행령 제20조 1항 5조

□ 기대 효과 : 관 외부 부식에 의한 누수 예방, 관로의 수명 연장

□ 그간 추진경위 및 향후일정

❍ 본부 실시설계 용역 준공 : 2022. 12.

❍ 도로굴착사업계획서 제출(강남구청 도로관리과) 및 도로굴착시스템 심의 요청 : 2022. 12.

❍ 도로굴착심의 의뢰 및 가심의조정 : 2023. 1.

❍ 심의 조정 결과(구청 도로과 및 서울시설공단) : 2023. 2. 14.

❍ 공사 계약심사 의뢰(본부 안전조사과) : 2023. 3.

❍ 감리용역 기술타당성 심사 의뢰(기술심사담당관) : 2023. 3.

❍ 도로굴착 허가 신청(구청 도로과 및 서울시설공단) : 2023. 4.

❍ 감리용역 착수 :  2023. 4.

❍ 점용 허가 신청(구청 건설관리과) 및 관리청복구비 선납 :  2023. 5.

❍ 전식방지공사 착공(본청 재무과 계약) :  2023. 5.

❍ 전기사용 신청 및 시설부담금 납부 : 2023. 8.

❍ 전기설비 사용전점검 : 2023. 11.

❍ 전식방지공사 및 감리용역 준공 :  2023. 12.

붙임 1. 시방서 및 도면 각 1부.

2. GIS 도면 1부.

3. 도로굴착사업계획서 및 현장 조사서 각 1부.  끝.