문서번호	치수안전과-3764
결재일자	2023. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하천생태팀장	치수안전과장
강신현		이한복	02/23
			최연호
협조

설계변경(제2회) 및 준공기한 연기 보고

-2022년 하천관리전산시스템 유지관리 및 DB구축-

2023. 2.

치수안전과

- 2022년 하천관리전산시스템 유지관리 및 DB구축 -

설계변경(제2회) 및 준공기한 연기 보고

「하천관리전산시스템 유지관리 및 DB구축」용역의 드론촬영 내역 변경에 따른 설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고임

용 역 개 요

□ 용 역 명 : 2022년 하천관리전산시스템 유지관리 및 DB구축

□ 용역기간 : 2022. 4. 1. ~ 2023. 2. 28.

□ 용 역 사 : (주)부린

□ 용 역 비 : 금532,611,000원

□ 용역내용

- 하천관리전산시스템 유지관리(정기·수시 점검, 오류사항 수정, 사용자교육 등)

- 하천관리전산시스템 DB구축

· 드론뷰(영상, 파노라마) 촬영 및 DB구축

· 하천기본계획, 하천내 가로등, 용역성과품, 하천 유지관리 업무 DB구축

· 유관기관 연계 및 현행화

추 진 경 위

□ '22. 4. 1. : 용역 착수

□ '22. 6. 30. : 복개하천 12개소 드론촬영 완료(연장: 36.43km)

□ '22. 10. 30. : '22.8.8. 집중호우 관련 CCTV 업로드 완료(9개 구청, 1,120개소)

□ '22. 11. 23. : 설계변경(1회) 및 준공기한 연기

□ '22. 12. 1. : 부분준공 및 기성금 지급(기성금 : 488,311천원 / 사고이월 : 44,300천원)

□ '22. 12. 28. : 가로등 현장조사 및 지도연계 완료

□ '23. 2. 20. : 복원하천 19개소 드론촬영 완료 (총 30개소 하천 중 70% 완료)

설계변경 및 준공기한 연기

설계변경

□ 계약금액 : 532,611천원 → 532,611천원(변경없음)

※ 유지관리 : 82,657천원 / DB구축 : 449,954천원

□ 변경내역 : 드론촬영 구간 및 거리 변경

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
비행금지 구간 포함 지역(km)	159.48	131.68	△27.8	한강 남·북단, 안양천, 중랑천, 반포천 일부구간
신규촬영 구간 포함 지역(km)	21.17	51.14	29.97	소하천 18개소 포함
계(km)	180.65	182.82	2.17	금액 변동없이 촬영

□ 변경사유

- 대통령 관저 및 김포공항 활주로 인근 비행금지구역 내 하천 드론촬영 불가

- 청와대 인근 기존 비행금지구역의 촬영이 가능해짐에 따른 추가 촬영

- 소하천(18개소), 향동천 등 신규 촬영구간 연장 추가

준공기한 연기

□ 변경내역

- 당초 : 2022. 4. 1. ~ 2023. 2. 28.

- 변경 : 2022. 4. 1. ~ 2023. 3. 20.

□ 연기사유 : 2022. 12. 26. ~ 12. 28. 북한 무인기 영공 침범에 따른 드론                     비행 불가로 인한 촬영 지연으로 과업기간 부족

□ 지체상금 : 미부과

향 후 계 획

□ '23. 2. ~ 3. : 복원하천 11개소, 소하천 18개소 드론 촬영

□ '23. 3. 20. : 용역 최종보고회 및 준공

붙  임 : 1. 변경 산출내역서 1부.

2. 변경 과업지시서 1부.

3. 별첨자료 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.