문서번호	총무과-5450
결재일자	2023. 2. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
정찬교	성호준	02/23
		조영창

설계변경 검토보고

(서소문청사 1동, 3동 사무환경 개선 전기공사)

2023.  2.

행 정 국

(총무과)

설계변경 검토보고

(서소문청사 1동, 3동 사무환경 개선 전기공사)

「서소문청사 1동, 3동 사무환경 개선 전기공사」시행 중 시공여건 변경 및 산업안전보건관리비 정산에 따라 설계변경 시행하고자 함.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 서소문청사 1동, 3동 사무환경 개선 전기공사

ㅇ 공사기간 : 2023. 2. 2. ~ 2. 28.

ㅇ 계약금액 : ************

ㅇ 계 약 자 : *********

□ 설계변경 근거

ㅇ 공사계약 일반조건 제7절(계약금액의 조정)

ㅇ 계약상대자 설계변경 서류 제출(*********01, 2023. 2. 22.)

□ 설계변경 및 계약금액 조정

ㅇ 설계변경 내용

< 현장 상태에 따른 설계변경 >

- ***********************************

- *******************************

- *******************************************

< 발주기관의 필요에 따른 설계변경 >

- ********************************

< 산업안전보건관리비 정산 >

- 산업안전보건관리비 실 집행금액으로 정산, 감)535천원

· 근거 : 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용금액의 감액)

ㅇ 공정별 세부 변경내용

(단위 : 천원)

공정명	변경내용	변경사유	변경금액
전등설비	********** ********	**********************************************	******
	*************	*********************************************
전열설비	***********	***************************************	********
	*************	*******************
냉난방설비	************* **********	****************************************************	********
산업안전 보건관리비	************ ************** ************	**************** ***************** ************	******

ㅇ 계약금액 조정

- 계약단가 적용(공사계약일반조건 제7절에 의함)

· 증감된 공사량의 단가: 산출내역서의 계약단가 적용

· 산출내역서에 없는 품목 : 현 기준으로 산정한 단가에 낙찰률 적용

- 계약금액 변경

당 초	변 경	증·감액
************	************	없음

· *직접공사비의 변경은 있으나, 산업안전보건관리비 등의 조정으로 전체 계약금액은 변동 없음

*직접공사비: 계약목적물의 시공에 직접적으로 소요되는 재료비, 노무비, 경비의 합

□ 공사감독자 검토의견

ㅇ 위 설계변경 내용은 현장상태에 따른 시공물량 변경, 산업안전보건관리비 정산에 대한 내용으로 설계변경의 필요성이 인정되며, 변경되는 수량 및 단가는 '공사계약 일반조건'에 근거하여 적정하게 산출되었으므로 설계변경 시행하고자 함.

□ 향후계획

ㅇ ’23.2월 말 : 설계변경 시행 및 공사준공

ㅇ ’23.3월 초 : 준공검사 및 대가지급

붙임 : 계약상대자 설계변경 제출 서류 1부.  끝.