문서번호	치수안전과-3940
결재일자	2023. 2. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수총괄팀장	치수안전과장
조현범		김지환	02/24
			최연호
협조

2023년 자연재해저감 종합대책 시행계획

2023. 2.

물순환안전국

(치수안전과)

2023년 자연재해저감 종합대책 시행계획

자연재해의 피해예방 및 저감을 위해 2016년 수립한 자연재해저감 종합대책에 대하여 2023년도 사업추진계획을 수립·추진하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 자연재해대책법 제16조의2(자연재해저감 시행계획의 수립 등)

❍ 자연재해대책법 시행령 제14조의3(자연재해저감 시행계획의 작성 등)

Ⅱ		기 본 방 향

❍ 풍수해로부터 시민의 생명보호와 재산피해 최소화

❍ 하천기본계획, 하수도정비 기본계획 등을 종합적으로 반영하여 실행 가능하도록 추진

❍ 자연재해 위험지구 해소사업 추진으로 위험요인 해소

Ⅲ		자연재해저감 종합계획 개요(16년 수립)

❍ 자연재해 위험지구 지정 : 총 240개 지구

- 하천재해 76개, 내수재해 51개, 토사재해 6개, 사면재해 107개

❍ 총사업기간 : 2017.1 ~ 2026.12

❍ 총사업비 : 20,515억원(구조적대책 17,436, 비구조적대책 3,079)

❍ 연차별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분		합계	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025		2026
개 소		240개	8개			52개			115개			65개
금 액		20,515	2,331	2,331	2,331	2,838	2,831	2,832	1,257	1,256		1,255	1,253
	구 조	17,436	2,022	2,022	2,022	2,529	2,522	2,522	951	950		949	947
	비구조	3,079	309	309	309	309	309	310	306	306		306	306

※ 2016년 풍수해저감 종합계획 용역 ’12.5~’16.8월 수행

Ⅳ		추 진 실 적

❍ 추진현황 : 240개소 중 118개 위험지구 추진(완료 99, 추진중 19)

❍ 추진금액 : 7,290억원

- 구조적대책 : 5,341억원

□ 하천재해(76개)   : 20개 지구 1,466억원(완료 9, 추진중 11)

□ 내수재해(51개)   : 20개 지구 3,856억원(완료 13, 추진중 7)

□ 토사재해(6개)    : 2개 지구  4억원(완료 2)

□ 사면재해(107개) : 76개 지구 15억원(완료 75, 추진중 1)

- 비구조적 대책 : 1,950억원

□ 풍수해보험, 하천 예경보시설, 하수관거 유지관리비, 빗물펌프장 유지관리비

Ⅴ		2023년 시행계획

****************************************

***********************

**********************************

***************************************************

**************************************************************

*****************

******************

**************************

************************************************

*********************

********************************************************

*********************************************************

❍ 세부 사업내용

【 구조적대책 】

**	** **	*******	****	****	******* *****	**
		*****			******
*	**** ****	*************	******	****** ******	*****
*	**** ****	*************	****** **	****** ******	*****
*	**** ****
*	*** ****	******************	******	****** ******	******
*	*** ****	**********	**********	****** *****	*****
*	***********	*************	******** *******	****** ******	******

【 비구조적 대책 】

**	***********		******* *****	**
	****		******
*	**********		******
*	*****		***
*	***********		******
		*****************	*****
		*****************	***
		*****************************	******
		*****************	*****
*	******************		***

*********************************************

******************************