문서번호	토목부-3527
결재일자	2023. 2. 27.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		이성주	02/27
			이임섭
협조
	주무관		이상현

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(받침장치 규격(용량) 변경) 검토 보고

2023. 02.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(받침장치 규격(용량) 변경) 검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 받침장치 규격(용량) 변경  실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근    거

○ *********************************************************

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 : 보행교 신설(B=10.0~15.0m,  L=110.5m)

○ 도 급 비 : *********

○ 사업기간 : `21. 04. 19. ∼ `24. 04. 18.

- 1차 : `21. 04. 19.  ~ `22. 12. 02.**************************

- 2차 : `22. 10. 17.  ~ `23. 10. 16.**************************

○ 시 공 사 : *************

○ 감 리 사 : ***************

□ 추진경과

○ `21. 11. 10 : 설계사 설계도서 검토결과 및 조치계획제출.

○ `22. 02. 21 : 설계사 설계도서 변경 납품(1차).『설계도서 변경 보고』

교량받침 용량변경 (탄성받침 1000KN→1750KN)

○ `23. 01. 13 : 받침규격변경에 따른 검토요청(사업관리단 → 기술지원기술인)

○ `23. 01. 20 : 기술지원기술인 의견서 제출 → 풍하중관련 각부재력의 반영 검토필요

(기술지원기술인 → 사업관리단)

○ `23. 02. 02 : 원설계사  풍하중관련 각부재력의 구조 해석값 제출

(원설계사 → 사업관리단)

○ `23. 02. 13 : 기술지원 기술인 교량받침 용량변경 적정성 확인

(기술지원기술인 → 사업관리단)

□ 실정보고 검토

○ 건축풍하중에 의한 수평력 용량검토 반영에 따른 받침규격 변경

- 당초 : 탄성받침(1,000kN) → 변경 : 탄성받침(1,750kN)

○ 받침용량 검토

- 당초 연직반력 및 내진설계에서 탄성받침 1,000kN을 만족하였으나 보행교

아치리브에 설치되는 건축 외장재, 아치리브 및 케이블, 바닥판주형에

작용하는 풍하중을 고려할 경우 연직반력은 만족하나 수평반력 용량 부족

으로 검토되어 연직력과 수평력을 모두 만족하는 탄성받침 1,750kN으로

적용

구 분		최 대 작용력 (kN)	당초 : 탄성받침 1,000kN			변경 : 탄성받침 1,750kN
			허용받침 용량(kN)	검 토	비 고	허용받침 용량(kN)	검 토	비 고
시점부	연직반력	251.937	1,000	O.K	25.2 %	1,000	O.K	25.2 %
	수평반력	115.730	80.5	N.G	143.8 %	120.8	O.K	95.8 %
종점부	연직반력	249.095	1.000	O.K	24.9 %	1.000	O.K	24.9 %
	수평반력	113.948	80.5	N.G	141.6 %	120.8	O.K	94.3 %

○ 받침배치도

당초 1,000kN	변경 1,750kN

○ 수량 변경 내역

- 당 초 : 1,000kN 14개 → 변경 : 1,750kN 14개

구 분	규 격	단 위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감
교량받침(탄성받침)	1000KN(고정단)	EA	7	0	7
교량받침(탄성받침)	1750KN(고정단)	EA	0	7	7
교량받침(탄성받침)	1000KN(일방향)	EA	7	0	7
교량받침(탄성받침)	1750KN(일방향)	EA	0	7	7

○ 공사비 변경 내역

- **************************************

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증.감		비 고
교량받침설치(고정단1000KN→1750KN)	*****	*****	*	*****
교량받침설치(일방향1000KN→1750KN)	*****	*****	*	*****
직접공사비	*****	*****	*	*****
제경비,부가가치세	*****	*****	*	*****
도급공사비	*****	*****	*	*****
관급자재비	******	******	*	*****
총공사비	******	******	*	******

○ 공사비 변경 내역

- 협 의 일 : `23. 02. 21.(화)

- 참 석 자 : ****************************

- 협의결과 : 협의율 93.003% 적용

공 종	시공사(안)	발주처(안)	적 용
교량받침 설치(1,750kN)	********* ********	************ **	********* ************ ***************

□ 검토결과 및 조치계획

○ 아치리브에 설치되는 건축외장재, 아치리브 및 케이블, 바닥판 주형에 작용하는 풍하중 검토결과 당초 받침장치의 수평반력 용량 부족에 따른

받침장치 규격(용량) 변경은 적정한 것으로 판단되며 관급자재 및 설계변경에 반영 하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고서 1부.끝.