문서번호	도로과-3016		주무관		보도관리담당	도로과장		건설교통국장
결재일자	2023. 2. 27.		김경화		이기영	송승익		02/27
공개여부	부분공개(5)							김석우
방침번호			협조
방침번호
				캠퍼스타운조성담당			전해만

-안암동 문화가로 및 안전거리 조성공사-

하수관로 개량공사 병행시행

2023. 2.

건설교통국

(도 로 과)

- 안암동 문화가로 및 안전거리 조성공사-

하수관로 개량공사 병행시행

우리구 "안암동 문화가로 및 안전거리 조성공사"구간 중 2개소의  하수관로 노후로 교체공사 요청(치수과)이 있어 아래와 같이 병행 시행하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

⵨ 안암동 문화가로 및 안전거리사업 관련 병행공사 협조 요청 (치수과-1876, ’23.2.18.)

Ⅱ		사업개요

□ 공 사 명 : 안암동 문화가로 및 안전거리 조성공사

□ 공사기간 : 2023. 3. ~ 7.

□ 공 사 비 : 1,524,669천원 (시비)

□ 공사규모 : 도로포장  B=4~12m, L=3,350m

○ 아스팔트 포장 73,1a, 보도포장 8,8a

Ⅲ		현 황

⵨ 본 공사는 측구 정비 및 평삭 후 도로 재포장으로 계획되어 있으며, 공사시행에 따른 타부서 의견 조회시 치수과 하수관로 노후로 교체가 시급한 구간(2개 구간)이 있어 병행공사 요청

○ 병행공사 요청구간

- 개운사길 57-3~개운사2길 14 : D=450mm, L=44m

- 고려대로27길 42~고려대로27길 24-1 : D=450mm, L=96m

○ 소요예산: 약 50,000천원

Ⅳ		문 제 점

⵨ 본 사업 기본계획 및 실시설계시 지하시설물(하수관로)에 대한  노후 하수관 개량에 대한 검토가 필요할 것으로 사료되나 미실시.

⵨ 하수관 교체없이 측구 및 포장부분에 대한 정비시 굴착통제에 따라 2~3년 이내에 하수관 정비공사 불가하며

⵨ 현재 치수과에 예산 미교부 및 교부되더라도 발주 등에 소요되는 법정기일로 안전거리 조성공사의 추진에 막대한 지장을 초래하고 있어 별도의 조치계획 강구가 필요함.

Ⅴ		조치계획

⵨ 공사로 인한 소음 및 교통통제로 인한 주민 불편 사항 등 민원이 우려되는 사항으로 "안전거리 조성공사"에서 병행 하수관 교체공사를 추진하여 민원을 최소화 하고 조속 공사를 완료하고자 하며

⵨ 공사에 소요되는 예산은 "안전거리 조성공사"의 낙찰차액 활용하여 쾌적한 보행환경 조성에 만전을 기하고자 함.

○ 낙찰차액 : 금90,047천원

○ 소요예산 : 금50,000천원

붙임 1. 위치도 및 현장사진 1부.

2. 치수과 병행공사 요청공문 1부.  끝.