아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(휴무일 및 평일 야간 작업계획서 승인 알림(2023.3월))

1.업무지시현장 : 영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목) 현장

2.작 성 일 자 : 2023-02-28 09:02:41

3.지 시 내 용

가. 대한(영동) 제23-29(2023.2.27.)호와 관련입니다.

나. ‘영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목)’ 관련 휴무일 및 평일 야간 작업계획에 대하여 아래와 같이 승인하오니, 건설사업관리단 및 시공사에서는 승인조건(현장관리자 배치기준 준수, 공사장 안전 및 품질관리 등)을 준수하면서 공사 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 작업기간

- 휴 무 일  : 2023.3.1. / 3.4. / 3.11. / 3.18. / 3.25.

- 평일 야간 : 2023.3.1.~3.31.(18:00~명일 06:00)

○ 작업내용

- 아셈타워 앞 : 측벽파일 천공 및 근입

- 아이파크 앞 : 지하연속벽 굴착

- 터널작업구  : 작업구 암반굴진

○ 귀책사유 : 시공사.  끝.

주무관	윤득근		복합개발토목과장	02/28
이승우
협조자
시행	영동대로복합개발추진단-2021	(	2023. 2. 28.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 3층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2821	/전송	02-6438-2805	/	yoon09140@seoul.go.kr	/	부분공개(6)