문서번호	정수시설과-585
결재일자	2023. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
박병석		02/28
		여인웅
협 조
	주무관			박형수
	주무관			노성제

중앙제어실 DLP 프로젝터 교체 작업일정 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3

구의아리수정수센터

[정수시설과]

중앙제어실 DLP 프로젝터 교체 작업일정 보고

노후된 중앙제어실 모니터월(영상감시) 시스템 교체와 관련 작업 일정을 보고 드림.

□ 추진근거

ㅇ '23년 정수센터 시설 정비 사업(전기분야)발주 계획 : 정수시설과-23115, '22.12.30

ㅇ 특정제품 선정심사위원회 심사결과 보고 : 정수시설과-457, '23.2.16

ㅇ 중앙제어실 모니터월 시스템 구매 : 정수시설과-487, '23.2.20

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 중앙제어실 DLP 프로젝터 교체

***************

**********************************************

*************

□ 작업일정

ㅇ 일    시 : 2023. 3. 6 ~ 3. 29

ㅇ 작업(납품)업체

******************************

*********************************

ㅇ 현장사진

******)	*******

ㅇ 작업내용

– 인테리어 공사

– DLP철거

– 배관 및 케이블공사

– DID납품 및 설치

– 월 컨트롤러 설치

– 시스템 설정 및 운영교육

ㅇ 세부작업일정

구 분	3/6 ∼ 3/10					3/13 ∼ 3/17					3/20 ∼ 3/24					3/27 ∼ 3/31
인테리어 공사
DLP 철거 (배관 및 케이블설치)
DID납품 및 설치
월 컨트롤러 설치 (입출력 연결 및 S/W 설치)
시스템설정 및 점검 TEST
운영교육

※ 작업세부작업일정은 유동적이며 변경 시 제어실 통보.  끝.