문서번호	도시철도토목부-2408
결재일자	2023. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		박형복	02/28
			류용열
협 조
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

5차공사 물량조정에 따른 설계변경 검토보고(5차1회)

2023. 2

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

5차공사 물량조정에 따른 설계변경 검토보고(5차1회)

건설사업관리단으로부터 제출된 5차공사 물량조정에 따른 설계변경(5차1회) 요청에 대한 검토보고 임.

※ 관련서류 : 동기공 제2023–1130호(’23.2.28) “설계변경 계약요청(5차1회)”

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약 법률 제22조(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정)

ㅇ 공사계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

ㅇ 위    치 : 경기도 남양주시 오남읍 양지리 ~ 진접읍 금곡리 일원

ㅇ 공사금액 : **************************

ㅇ 공사기간 : ’18.12.31.∼ ’24.10.29. (5차공사 ’22.11.1.∼’23.3.31.)

ㅇ 규    모 : 인입선(L=5,556m), 차량기지(113m)

ㅇ 건설사업관리단 : ㈜동명기술공단건축사사무소 외 4개사

ㅇ 도 급 자 : ㈜KCC건설

ㅇ 계약현황

(단위 : 백만원)

구 분	전 체	계 약 현 황			비고
		기시행 (1차~4차)	5차 (진행중)	잔 여
계약금액	*******	******	*****	******
계약기간	‘18.12.31~ ‘24.10.29	‘18.12.31~ ‘22.12.31	‘22.11.01~ ‘23.03.31

□ 추진경위

ㅇ ’21.12.22 : 물가변동(K3) 조달청 검토완료**********************

ㅇ ’22.04.11 : 물가변동(K4) 조달청 검토완료**********************

ㅇ ’22.08.01 : 물가변동(K5) 조달청 검토완료**********************

ㅇ ’22.11.01 : 5차공사 계약 및 착공

ㅇ ’22.12.05 : 물가변동(K6) 조달청 검토완료**********************

ㅇ ’22.12.21 : 전체4회 설계변경**************

□ 건설사업관리단 보고내용

【5회 1회】

ㅇ 변경사유

- 전체4회 설계변경에 따른 터널 패턴변경 등 공종변경과 물가변동(K3~K5) 신규 반영에 따라 차수 설계 변경 필요

ㅇ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

공 종	공 사 비				비 고
	당 초	변 경	증 · 감
1. 터 널	3,163,053	2,040,641	감)	1,122,412
2. 가설공	23,374	36,513	증)	13,139
3. 부대공	-	11,151	증)	11,151
4. 미확정설계공종(P.S)	-146,005	-91,862	증)	54,143
5. 제경비(보험료 外)	890,753	559,188	감)	331,565
6. 물가변동비(K1~K2)	268,825	178,005	감)	90,820
7. 물가변동비(K3~K5)	-	1,466,364	증)	1,466,364
도 급 액	4,200,000	4,200,000		-
관급자재비	-	-		-
총 공 사 비	4,200,000	4,200,000		-

ㅇ 주요 변경내용

(금액단위 : 천원)

공 종	당 초		변 경		증 · 감
	내 용	금 액	내 용	금 액	내 용	금 액
터널굴착 (단선터널)	상선굴착 43.4m 하선굴착 90.0m	1,738	상선굴착 43.8m 하선굴착 43.8m	1,447	상선굴착 증) 0.4m 하선굴착 감)41.7m	감)	291
터널굴착 (복선터널)	굴착 391.0m	1,105	굴착 107.5m	338	굴착 감)283.5m	감)	767
수직구	-	-	인력리프트 운영	3		증)	3
터널부대공 외	공사중 설비 외	320	공사중 설비 외	253		감)	67
가설 및 부대공	살수차 운영 외	23	가설사무실, 부지임대료 살수차 운영 외	48		증)	25
P.S공종	발생암 매각대금 외	-146	발생암 매각대금 외	-92		증)	54
제경비	4대보험료 등	891	4대보험료 등	559		감)	332
물가변동비	K1~K2	269	K1~K5	1,644	K3~K5 신규 반영	증)	1,375
도 급 액		4,200		4,200			-

작업구1(단선터널 하선)	작업구1(단선터널 하선)
작업구3(종점부 복선터널)

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 5차공사 공사비와 공사기간 변경없이 전체4차 설계변경(‘22.12.21)으로 인한 터널 패턴변경 등 공종변경 및 물가변동비(K3∼K5) 신규 반영에 따른 계약내역 변경 건으로 5차공사의 공사구간(공사물량) 일부 조정되었고 적절하게 변경됨을 확인함.

- 상기 검토내용과 같이 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사와 관련하여, 설계변경(5차 1회) 요청 건에 대해 검토한 결과 적정하다고 판단됨.

□ 조치의견

ㅇ 원활한 공정추진을 위해 계약기간 및 계약금액 변경없이 5차공사 물량을 조정하는 것으로서,

ㅇ 효율적인 예산관리 등을 위해 건설사업관리단이 요청한 5차1회에 대해 아래와 같이 변경계약을 추진코자 함.

- 변경계약(안)

(단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 괄	계약금액	***********	***********	******
	계약기간	********** *********	********** *********	******
5차1회	계약금액	*********	*********	******
	계약기간	********** *********	********** *********	******

붙 임 : 1) 감리 검토의견서 1부.

2) 시공사 요청공문 및 설계변경내역서 1부.

3) 합의각서 1부. 끝.