문서번호	문화예술과-3417
결재일자	2022. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공연예술팀장	문화예술과장		문화본부장
송서현	김용환	박원근		03/15 주용태
협 조

서울남산국악당 공연시설 개·보수계획

2022. 3.

문 화 본 부

(문화예술과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	남산국악당 수탁사 ㈜인사이트모션
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

서울남산국악당 공연시설 개·보수 계획

서울남산국악당의 노후시설 개·보수를 통하여 시민 및 예술인의 안전을 확보하고 최근 시행된 중대재해 처벌법 등에 대비하고자 함

1		시설현황

○ 위    치 : 서울시 중구 퇴계로 34길 28(필동 2가 84-1)

○ 시설규모 : 대지 2,359㎡, 연면적 2,935㎡ (지하2층, 지상1층)

○ 주요시설 : 공연장(300석), 전시실, 연습실, 야외마당, 카페

※ 남산골한옥마을(전통정원, 국악당 포함) 총면적 : 79,937㎡

○ 운영현황

- 운영방식 : 예산지원형 민간위탁(남산골한옥마을 및 국악당 통합운영)

- 위탁기간 : ’22.1.1. ~ ’24.12.31.

- 수탁기관 : ㈜인사이트모션

○ 사 업 비 : 2,020백만원 (’22년 민간위탁금)

2		사업개요

○ 공 사 명 : 남산국악당 공연시설 보수공사

○ 내    용 : 조명 및 무대, 관람석 보수

○ 기    간 : 2022. 4. ~ 7(4개월)

○ 소요예산 : 161,500천원

3		세부추진계획

□ 시설현황 및 문제점

○ (객석조명) 구형 할로겐 조명사용으로 잦은 교체주기 및 낮은 효율성

- 기존 전구타입인 할로겐 등은 내구연한이 짧아 지속적 교체 필요

- 등기구풀림 현상 발생으로 전구 추락사건 발생 등 위험성 높음

※ ’21.2. 공연 리허설 도중 전구 추락사건 발생

○ (객석의자) 의자꺼짐 등으로 쾌적한 공연관람 저해 및 관객 안전위협

- 내구연한(8년)을 초과사용, 오염 및 파손이 심각하여 악취 발생 및 의자 꺼짐

- 방염 유효기간(5년)을 초과하여 화재시 위험성 증가

○ (연습실 바닥) 개관 이후 보강공사 미실시 및 노후화로 예술인 부상위험

- 바닥에 별도 완충 완화 시공 없는 마루시공으로 무용‧연희 연습에 부적합

- 연습실 바닥(마루) 파손으로 연습 중 예술인 부상 위험

※ ’21.12. 추다혜-<짓> 공연을 위한 연습실 사용도중 부상 사건 발생

객석조명(전구추락)	객석의자(복원력 상실)	연습실 바닥(갈라짐)

□ 세부추진계획

○ 추진방법 : 위·수탁협약서에 의거 수탁사((주)인사이트 모션) 공사 시행

※ ’22년 ‘민간위탁사업비’ 추경 편성 및 교부 예정

○ 추진절차

- 남산국악당 시설보수계획 수립(시) → 민간위탁금교부(시) → 공사발주 및 시공(수탁기관) → 사업결과 및 정산(수탁기관)

○ 개·보수 내용 및 소요예산

구 분	공사내용	주요내역	소요예산 (천원)
계			161,500
*******	************************************* *******************************	******* *******	******
		*****	******
*******	*******************************	**** ******	******
		********	*****
********	*************************	***** *********	******

○ 공사일정(안) : ’22. 4월 ~ 7월 (총 4개월)

업체선정 및 설계		공사준비		객석 조명 및 연습실 공사		객석교체 공사		검수
□4월 1주 ~ 6월 2주		□6월 3주		□6월 4주 ~ 7월 1주		□7월 3주		□7월 4주

4		행정사항

○ 시설 개·보수 예산확보(’22. 제1차 추경)	: ’22. 3월

○ 사업비 교부	: ’22. 4월

○ 수탁업체 사업시행 및 결과보고	: ’22. 4월~7월

※ 업체 선정 및 계약 : 나라장터를 통한 입찰/ 제안서 평가