문서번호	시설관리과-3689
결재일자	2023. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
최경철		김재영	03/02
			문병희
협조

사토장 변경 검토보고

(2022년 2차 서초구 관내 상수도공사)

2023.  03.

강남수도사업소

(시설관리과)

사토장 변경 검토보고

「2022년 2차 서초구 관내 상수도공사」와 관련하여 **************으로부터 사토장 위치변경 실정보고가 접수되어 검토결과를 보고 드림

□ 관련공문

○ 토사 반입불가 회신【수도권매립지관리공사 매립부-329('23.2.20.)】

○ 실정보고 제출(사토장 변경)【대콘-10(‘23.02.28.)】

□ 공사현황

********************************

********************************

************************

*************************

*******************************************************

□ 변경사유

○ 수도권매립지로부터 토사 반입불가에 따른 사토장 변경필요

- 공사장에서 발생되는 토사를 수도권매립지에 반입을 요청하였으나, 수도권매립지공사로부터 부유물(폐아스콘) 혼합사유로 반입 불가 되었음

- 소규모 상수도 공사장 굴착 시 발생되는 토사는 대부분 일부 부유물(폐아스콘)이 혼합되어 있어 매립지에서 요구하는 양질의 잔토 반입이 어려운 실정임

□ 검토의견

○ 매립지로의 토사반입이 불가되어 토사를 반입할 수 있는 대체 사토장이 필요한 실정임

○ 대체 사토장 선정 및 현장실사

구 분	위 치	거 리
당 초	*******	******
변 경	****************************	****

- 개발행위허가증 및 기타서류 적정 확인

○ 공사비 증·감 비교

(단위 : 원)

공 종	수량	단위	당초 (47.5km) 집하장→매립지		변경 (59km) 집하장→(변경)사토장		비 고
			단 가	금 액	단 가	금 액
잔토처리	***	*	******	**********	******	**********	***********

○ 운반거리, 운반속도 등을 적정하게 검토하여 산정한 것으로 판단되므로, 설계변경시 반영하여 정산하고자 함

□ 행정사항

○ 사토장 변경에 따른 승인통보

- 변경된 사토장에 대하여 ************* 및 ***************에 승인통보

○ 해당공종 설계변경 적용시행

- 향후 설계변경 시 공사비 증·감사항에 대하여 적용 시행

붙임  1. 토사반입 불가 회신(공문) 1부.

2. 실정보고 제출(사토장 변경) 1부.  끝.