문서번호	급수운영과-3299
결재일자	2023. 3. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
장형준		전동근	03/02
			박종일
협조

도로포장복구 협조요청건 조치계획

(영동대로 상수도관 이설(2단계)공사 관련)

2023. 3.

강남수도사업소

(급수운영과)

도로포장복구 협조요청건 조치계획

(영동대로 상수도관 이설(2단계)공사 관련)

서울시상수도사업본부(배수과)에서 시행중인 「영동대로 상수도관 이설(2단계)공사」와 관련, 도로(임시)포장 협조요청건에 대하여 아래와 같이 검토 보고 드림

□ 관련 사항

○ 상수도사업본부 배수과-1735(2023.2.27)호

- 『영동대로 상수도관 이설(2단계)공사』 관련 포장복구 요청

○ 요청사항(본부 배수과)

- 시행기간 : '23.03.02~03.20(예정)

- 굴착구간 : 봉은사역~봉은사입구(아스팔트, L=250m)

- 포장구간 : 횡단굴착 8개소

※ 요청사유 : 도로관리청(동부도로사업소)의 도로포장 업체계약 지연됨에 따라 원활한 공사추진을 위해 한시적으로 사업소에 포장복구 협조 요청

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 영동대로 상수도관이설(2단계)공사

○ 공사위치 : 봉은사역→봉은사사거리(봉은사로86/87길)→삼성역(도심공항교차로)

○ 공사규모 : 상수도관 이설 D=900~1200mm, L=1.2km

○ 공사기간 : 2022.12.01~2023.09.30(관로공사 '23.03.02부터, 야간)

○ 시 공 사 : (주) 덕천기공 ***

○ 본부 담당자 : ****************************

○ 공사감독 : 서울시설공단 공사관리2처

□ 조치 계획

○ 포장공사시 안전시설 설치 및 안전조치 : (주) 덕천기공(이설 시공사)

○ 포장복구 : 강남수도사업소 연간단가업체 [(주)이조건설]

- 가복구(중층) ASP,  L = 개략 250m

- 현장감독 : 서울시설공단 공사관리2처

□ 행정 사항

○ 포장공사 완료후 정산자료 제출 (서울시설공단 → 강남수도사업소)

○ 정산결과에 의거 예산 재배정 요청 및 정산시행

[강남수도사업소(급수운영과) → 상수도사업본부(배수과)]

붙임 1. 관련공문 1부.

2. 굴착복구 위치도 및 현황 1부. 끝.