문서번호	건축부-3407
결재일자	2023. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
고병연		代고병연	03/02
			이형재
협조

『시립서대문농아인 별관 건립공사』

타워크레인 설치 실정보고 검토보고

2023. 3.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시립서대문농아인 별관 건립공사』

타워크레인 설치 실정보고 검토보고

『시립서대문농아인 별관 건립공사』관련 타워크레인 설치 및 운영비가 내역서에 누락되어 실정보고가 책임건설사업관리기술인으로부터 제출되어 검토 후 보고 드림.

- *****************************

1		사업개요

○  사 업 명 : 시립서대문농아인복지관 별관 건립공사

○  위    치 : 서대문구 남가좌동 295-18 외 2

○  공사기간 : 2021.5.11.~2024.1.31.

○  공사규모 : 지하2층/지상9층, 연면적 3,455.96㎡, 별동 증축

○  총사업비 : *********************

○  감리/시공 : ************************

2		추 진 경 위

○ '17.09.19. : 시립서대문농아인복지관 별관 건립 변경계획 수립

○ '19.12.16. : 설계용역 착수(설계용역 완료 : ’20.12.09.)

○ '21.05.11. : 공사 착공

○ '21.09.30. : 기존건축물 해체공사 완료

○ '22.03.29~22.11.28. : 터파기 공사완료

○ '23.02.01. : ************************

○ '23.02.현재 : ***************

3		실정보고 내용

○ 관련근거

- ****************************

********************************

- “지방 자치단체 입찰 및 계약집행기준”제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사의 설계변경

○ 실타워크레인 설치 위치 및 단면도

- 실정보고 사유
*****************************************************************

·*****************************

※ 설계자 의견 :  현장여건상 필요한 사항으로 내역에 포함되어야한 의견 제출

- 타워크레인 설치 평면도위치 및 단면도

- 타워크레인 설치 현황

형 식	작업반경	정격하중	최초설치높이	최종설치높이	코핑/브레싱	비고
무인 러핑크레인	25M	2.5T	30.5M	55.5M	벽체고정형

○ 타워크레인 설치 세부내역

(단위:원)

********		********	**	**	****	****	**
******************
***********	*******************		*	*	**********	**********
**** ****	*******		*	*	*********	*********
*********	***		*	*	*********	**********
*****	***** ******		*	*	*******	*********
********			*	*	*	**********

○ 타워크레인 실정보 변경금액

(단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	증, 감	비고
**********	*******
*********** *****		**********	**********
*****		*********	*********
*****		**********	**********
******	*******	***********	***********

- 안전관리비 타워크레인설치 시 3회이상 인상 필요함에 따라 정기안점점검

용역비용(건설기술진행법 시행규칙제59조 제1항)

4		감리자 검토의견

○ *******************************************

○ **********************************************

5		처리의견

○ *****************************************************************

붙 임 1. 티워크레인설치 감리단 기술검토의견서 1부.

2. 시공사 실정보고서 1부.  끝

2