아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	화물연대 파업에 따른 공사기간 연장 실정보고 승인통보 (서울 사진미술관 건립공사)

1.업무지시현장 : 서울 사진미술관 건립공사(장기1차) 신한토건(주) 외 4개사

2.작 성 일 자 : 2023-03-03 17:03:41

3.지 시 내 용

가. KDU(대외,사진) 제 23-34호(2023.2.16.) 관련입니다.

나. 화물연대 파업에 따른 공사기간 연장 및 간접비 발생 실정보고 건에 대하여 승인통보하오니, 추후 변경계약을 진행하시고 향후 공사 진행에 차질이 없도록 공정관리 및 안전관리등에 철저를 기해주시기 바랍니다.

다. 건설정보관리시스템 운영에 문제가 없도록 One-PMIS 상 공정산정기초를 변경공정표에 맞게 수정하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관	김유상		건축설계과장	代오종근		건축부장	03/03
이형재
협조자
시행	건축부-3561	(	2023. 3. 3.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 13층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2673	/전송	02-3708-2659	/	sang6183@seoul.go.kr	/	부분공개(5)