문서번호	건축부-3478
결재일자	2023. 3. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
이제관		최장길	03/03
			이형재
협조

『서서울미술관건립공사』

조경시설물 철거 및 운동기구 이설 실정보고 검토 보고

2023. 3

도시기반시설본부

(건 축 부)

『서서울미술관건립공사』

조경시설물 철거 및 운동기구 이설 실정보고 검토 보고

「서서울미술관건립공사」관련 건설사업관리단으로 부터 제출된 조경시설물 철거 및 운동시설 이설관련 실정 보고에 대한 검토 결과를 보고 드림

****************, 폐기물처리비 5,652천원

1		공 사 개 요

○ 공 사 명: 서서울미술관 건립공사

○ 위    치: 서울특별시 금천구 독산동 1151번지 (금나래 중앙공원 일원)

○ 규    모: 지하2층/지상1층, 연면적 7,186.99㎡

○ 공 사 비*********************************

○ 공사기간: 2022. 8. 18. ~ 2024. 10. 15.(1차: 2022. 8. 18. ~ 2023. 8. 15.)

○ 설계/감리/시공: (주)더시스템랩건축사사무소/(주)건축사사무소광장/이에스아이(주)

○ 현 공 정: 가시설(CIP)공사 공사중 (공정률 9%)

2		실정보고 검토내용

○ 근 거

구분	당초	변경	변경사유	비고 (공사비)
****	*****	*************** ************ ****************	********************	*******
*********	*****	************************	**********	*******

- 조경시설물 철거 및 운동기구 이설 실정보고〔광장(서서울)2023-109('23. 2 22.)호〕

○ 주요 변경 내용

***********************************************

********************************

○ 단가 적용기준(공사계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정) 주요 변경 내용

************************

- 계약단가 적용(건설폐기물)

3		건설사업관리단 검토의견

*********************************************************************************

4		처 리 의 견

○ 책임건설사업관리기술자의 검토의견에 따라 실정보고 승인.

○ 원활한 공정관리를 위하여 승인사항은 현장에 반영토록 우선 조치

○ 추후 관련절차에 의거 설계변경 시, 금액 확정(설계변경 자문 절차 계약심사 등에 따라 변동 될 수 있음을 통지)

붙임  1. 조경시설물 철거 및 운동기구 이설관련 실정보고 .  끝.