"꿈이 모이는 도시, 미래를 그리는 강남"

등록번호	도로관리과-4550		주무관	도로조명팀장		도로관리과장		안전교통국장		부구청장
			한현석	권행남		염태웅		오대중		03/06
등록일자
결재일자	2023. 3. 6.									정헌재
공개구분	대시민공개
			협조자		행정국장		정찬식
					재무과장		임경수
					계약팀장		김상은

- 안전하고 쾌적한 야간 통행환경 조성 및 에너지 절약을 위한 -

2023년 시도노선 노후 가로등 개량 계획

대상사업 : 총 4건[6,965,600천원(시비)]

(단위 : 천원)

사 업 명	위 치	사 업 개 요	사업기간	예산액
테헤란로 가로등 개량공사	강남대로 ~ 삼성교	- 가로등주 406본 개량 - 분전함 15면 개량 - 지중선로 12km 교체	‘23. 3 ~ 11	3,600,000
학동로 가로등 개량공사	강남대로 ~ 청담공원	- 가로등주 313본 개량 - 분전함 15면 개량 - 지중선로 8km 교체	‘23. 3 ~ 11	2,787,000
헌릉로 광원교체 공사	세곡교 ~용인고속도로	- 차도등 285, 보행등 216등 교체	‘23. 3 ~ 6	359,000
스마트 도로조명 에너지절감 (헌릉로)	세곡교 ~용인고속도로	- 차도등 센서 285개 설치 - 중계기 20설치	‘23. 3 ~ 6	219,600

추진일정

❍ 2023.  3.  8 : 설계용역 타당성심사 의뢰(기술심사담당관)

❍ 2023.  3. 30 : 서울시 좋은빛 심의 요청(도시경관담당관)

❍ 2023.  4. 20 : 공사계약원가 심사 의뢰(계약심사과)

❍ 2023.  5. 10 : 공사계약 및 착공

❍ 2023. 11. 30 : 공사준공.

	강 남 구
(		도로관리과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	•「서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례」 제16조 • 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 • 도로조명시설 설치 및 관리지침
공직선거법 검토	이 사업(업무) 추진과 관련하여 공직선거법 위반사항 등을 검토하였습니까?
	• 검토사항 예시 : 기부행위, 홍보물 발행, 행사 개최(후원), 업적 홍보, 선거 관여 등 • 검토결과 : 관련 법 등에 저촉이 없는 것으로 검토
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 강남구 시도노선 가로등 개량 연차별 추진 계획(도로관리과-13228, 2022.7.7.)
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 2023년 시비 재배정 예산
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 일반주민
(예상) 공공갈등 등급진단	이 업무(사업)과 관련하여 아래 민원발생 관련사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 다수의 이해관계인 존재여부 (○) ⑦ 법률 등 제도적 변경 필요여부 ( ) ② 강남구와 갈등발생(예정포함) ( ) ⑧ 갈등전개 과정에서 집단화 예상 ( ) ③ 언론매체 보도 여부 ( ) ⑨ 갈등의 표출형태(민원 등) ( ) ④ 보도된 횟수 ( ) ⑩ 해결방안(대책) 가능여부 ( ) ⑤ 보도된 매체 수 ( ) ⑪ 별도의 예산소요 여부 ( ) ⑥ 갈등해결 예상 소요기간 ( ) ⑫ 2개 이상 관련기관 협조여부 (○)
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요 (7개 항목 이상 체크 시 감사담당관 협조결재)
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ③ 미래행정 수요예측 및 시장조사 ----------------- ( ) ④ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑤ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 서울시 내 20개 자치구에서 시도 가로등 개량사업 시행
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

2023년 시도노선 노후 가로등 개량 계획

15년이상 경과된 테헤란로 · 학동로 가로등 전면 개량, 헌릉로 메탈 가로등을 LED조명으로 교체함으로써 조도 향상을 통한 야간 통행불편을 최소화하고 전기안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

- 안전하고 쾌적한 야간 통행환경 조성 및 에너지절약을 위한 -

Ⅰ			추 진 근 거

❍ 『2023년도 노후 도로조명시설 개량사업 추진 계획』

(서울시 도로시설과-640호(2023.1.12.))

Ⅱ			공 사 개 요

❍ 대상사업 : 총 4건[6,965,600천원(시비)]

(단위 : 천원)

사 업 명	위 치	사 업 개 요	사업기간	예산액
테헤란로 가로등 개량공사	강남대로 ~ 삼성교	- 가로등주 406본 개량 - 분전함 15면 개량 - 지중선로 12km 교체	‘23.3 ~ 11	3,600,000
학동로 가로등 개량공사	강남대로 ~ 청담공원	- 가로등주 313본 개량 - 분전함 15면 개량 - 지중선로 8km 교체	‘23.3 ~ 11	2,787,000
헌릉로 광원 교체공사	세곡교 ~용인고속도로	- 차도등 285, 보행등 216등 교체	‘23.3 ~ 6	359,000
스마트 도로조명 에너지절감 (헌릉로)	세곡교 ~용인고속도로	- 차도등 센서 285개 설치 - 중계기 20설치	‘23.3 ~ 6	219,600

Ⅲ			중점 추진사항

❍ 전기안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 조성

- 15년 이상 노후 시설 통합개량(등주, 등기구, 분전함, 선로, 기초 등)

- 스마트 조광제어(디밍)시스템 설치 및 LED등기구 개량

- 가로등주, 신호등을 통합(스마트폴)하여 쾌적한 보행환경 조성

- 가로등 활용 스마트 시티 구현을 위한 24시간 상시전원 공급

❍ 가로수로 인한 조도품질 저하구간 개선

- 가로수 가지치기 및 개량 구간 가로등 배치간격 조정(암대 등)

❍ 도로조명시설 설치 및 관리지침에 의한 설계 및 시공

- 전력기술관리법에 의거 가로등 개량공사 실시설계 용역 시행

Ⅳ			세부추진계획

❍ 추진절차

❍ 실시설계 용역

건 명	용 역 내 용	용역비용(천원)
테헤란로 가로등 개량공사 실시설계 용역	- 가로등주 배열방식 선정 - 지중선로 굵기 및 물량 산출 - 가로등주 및 등기구등 물량산출 - 스마트폴 및 디밍적용 - 내역서 및 도면 작성	55,000
학동로 가로등 개량공사 실시설계 용역		55,000
합 계		110,000

- 계 약 방 법 : 수의계약(여성기업)

- 수의계약사유 : 우기전에 공사착공을 위해 전문설계업체와 계약을 체결하여                       신속히 진행하고자 함.

- 근    거 : 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』

제25조제1항제5호 마목(추정가격 5,000만원 이하 여성기업 등)

❍ 전기공사

- 계약방법 : 제한경쟁입찰〔지역(서울시) 제한)〕

- 입찰참가자격 : 전기공사업법 규정에 의한 전기공사업등록업체로서 본점 소재지가 서울시에 소재한 업체

❍ 관급자재 구매

- 1억원이상 : 다수 공급자 2단계 경쟁에 의한 계약

- 1억원미만 : 특정제품선정심사 및 조달청 제3자단가계약

※ 특정제품선정심사 : 동일 특정제품의 재료원가가 합계금액에 5천만원 초과시 시행

❍ 예산과목

- 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 노후 도로조명시설 개량 사업, 시설비 및 부대비, 시설비<노후 도로조명시설 개량사업>

- 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 스마트 도로조명 에너지절약 사업, 시설비 및 부대비, 시설비<스마트 도로조명 에너지절약사업>

Ⅴ			기대효과

❍ 노후 가로등시설물 정비에 따른 전기안전사고 예방 및 도시미관 향상

❍ 노후된 가로등기구를 고효율 저용량의 LED조명으로 교체함으로써 조도향상을 통한 야간 통행불편 해소

❍ 상시전원 공급을 통한 스마트가로등 시스템 구축

Ⅵ			향후계획

❍ 2023.  3.  8 : 설계용역 타당성심사 의뢰(기술심사담당관)

❍ 2023.  3. 30 : 서울시 좋은빛 심의 요청(도시경관담당관)

❍ 2023.  4. 20 : 공사계약원가 심사 의뢰(계약심사과)

❍ 2023.  5. 10 : 공사계약 및 착공

❍ 2023. 11. 30 : 공사준공.

붙임 1. 2023년 『노후 도로조명시설 개량 사업』추진 계획 1부.

2. ‘23년 노후 도로조명시설 개량사업 추진계획(서울시) 1부.

3. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.