문서번호	공공의료추진단-2298
결재일자	2023. 3. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	행정1부시장 제33호

						시 민
주무관	시립병원건립팀장		공공의료추진반장		공공의료추진단장		시민건강국장	행정1부시장
서경식	송옥의		오승제		박진순		박유미	03/07
								김의승
협 조
	의료시설과장					차무흥

보라매병원 안심호흡기전문센터 사업계획 조정 보고

2023.  3.

시 민 건 강 국

(공공의료추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

보라매병원 안심호흡기전문센터 사업계획 조정 보고

기본설계 결과 시 산출된 사업비(공사비) 증가 관련 현안 문제를 해소하기 위한 사업계획 조정 검토결과를 보고 드림

Ⅰ		사업개요 및 추진경과

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 동작구 보라매로 5길 28

ㅇ 사업규모 : 지하3층/지상3층,

연면적 9,987㎡

ㅇ 주요용도 : 일반·중환자 음압병동(최대 72병상), 응급의료센터 등

ㅇ 사업기간 : ’16. 10. ~ ’24. 12.

ㅇ 총사업비 : 459억원****************************************

□ 추진경과

ㅇ ’15.12.~’16.10.  타당성조사 용역

ㅇ ’17. 7.~’17.12.  도시관리계획변경

ㅇ ’18.   ~’20. 4.  동작구민회관 부지협상 및 대체 공원부지 확보

ㅇ ’20. 7.~’21. 4.  도시계획 변경 및 공유재산심의회

ㅇ ’21. 7.~’21.12.  투자심사 및 설계자 선정

ㅇ ’22. 2.~’22. 8.  기본설계 완료(공사비 증액 요인 발생)

ㅇ ’22. 9.~’23. 2.  공사비 절감 및 사업규모 조정 검토 및 협의

Ⅱ		주요 현안 검토

□ 주요현안 및 문제점

ㅇ 주요현안: *********************

구 분	투자심사(‘21.7)	기본설계안(‘22.8)	비 고
공 사 비	*****	*****	*******
총사업비	*****	*****	*******

※ 증액사유 : *************************************[붙임1]

ㅇ 문제점: ***************************************[붙임2]

․ ***************************

*************************************************

□ 대책방안

ㅇ **********************************

① 사업규모

기 본 설 계	조 정 안	증 감
********* ***********	********* **********	****** ************

② 사 업 비

(단위: 억원)

구 분	투자심사 (A)	기본설계 (`22.8.)	조 정 안 (B)	증 감 (B-A)	비 고
공사비	***	***	***	****	************
설계비	**	**	**	**	******
감리비	**	**	**	***	******************
의료장비 및 집기비품 구입	**	**	**	*
기 타	*	**	**	**
보상비	**	**	**	*
계	***	***	***	***	***************

※ 사업비는 재투심 심사 대상 사업비 범위 내에서 변경될 수 있음[붙임3]

③ 사업기간

기 본 설 계	조 정 안	증 감
***************	***************	****

□ 사업계획 변경(안) 세부내용

ㅇ 사업내용 변경

기본 설계		변 경 안
*********************		********************
**************		**************
************		********
*********		********************

ㅇ 층별시설 변경(안)

기본 설계		변 경 안
행복관(기존) 안심관(신축)		안심관(신축) 행복관(기존)

※ 사업내용은 재설계 과정에서 조정될 수 있음

ㅇ 응급의료센터 관련 검토

************************************************************ [붙임4]

□ 보라매병원 협의사항

ㅇ ****************

ㅇ ***********************

****************************

ㅇ ***********************

ㅇ *******************************

**************

□ 행정사항

ㅇ******************************************

Ⅲ		향후계획

ㅇ *******************************************************

ㅇ ***********************************

붙임  1) 공사비 증가내역 1부

2) 절차 재이행 시 예상 소요기간 1부

3) 사업비 조정 세부내용 1부

4) 응급의료센터 이전 검토 1부

5) 설계개요 및 도면 1부.  끝.

붙임 1	공사비 증가내역

구 분	당 초		변 경		증가액	비고
	내 용	금액	내 용	금액
면적증가	****** **********	*	*********** ******************	**	**	******** ********************
물가상승률	*	*	********** ************	**	**	*********** ********
음압시설	****** *********** **	*	*****	**	***	************
			******	*
			*****	*
			**************	**
			******* *****	**
			****** ********	*
공사비 미반영	***	*	***********	*	*	*********
	***	*	********* *******	*	*	*********
	****** ******	*	****** ********	**	**	*********
	***** ***	*	******	**	**	********** **********
	**************	**	***************	**	**	*********
	****** ***	*	********************	**	**	******
	***	*	***************	*	*	******
		*	**********	*	*	*****************
		*	*******	**	**	***************
기타	***	*	***********************	**	**	*********** ********
	*** **********	*	********* **********	**	**	**************
	***	*	********** ********* ********	**	**	************ ********
시설비 증가액					***
감리비 및 설계의도구현비					**	************
총 증가액					***

붙임 2	절차 재이행 시 예상 소요기간

절 차	주요 내용	예상기간 (개월)	세부절차	비 고
❶사업타당성 조사의뢰서 작성 (운영 및 건축 계획)	업체선정	*	➀계획수립 ➁일상감사 ➂입찰공고 ➃적격심사 ➄계약 ➅착수보고 ➆중간보고 ➇완료보고	- 타당성 조사 수행 사전 조사 - 기존 보고서(2015) 활용 어려움
	보고서작성	***		- 타당성조사 의뢰서 작성
❷타당성조사 (지방재정법37) 총사업비500억↑	추진여부검토	*	➀계획수립 ➁타당성조사의뢰 ➂추진여부검토 - 사전검토(LIMAC) - 사업설명회(위원회,센터, 행안부, 지자체) ➃ 약정(조사기간, 금액) ➄ 중간보고(3~4개월) ➅ 최종보고(완료1~2주전)	- 재정투자사업 예산을 편성시 필요성 , 계획 타당성 심사 ※ 1, 4, 7, 10월 조사신청
	타당성조사	*
❸ 투자심사 (지방재정법37조 시행령41조) 총사업비300억↑ 예산편성전 실시	사전실무심사	*	➀심사자료작성 ➁사전실무심사 ➂현지심사/부서협의 ➃투자심사위원회 ➄결과통보(15일이내)	- 3~10월중 매월신청
	자체투자심사 (서울시)	*		- 전액 시비인 경우 금액관계없이 자체심사
❹건설기술타당성조사 (건설기술진흥법 제41조 영81조) 공사비500억이상 ❷ 타당성조사와 병행추진 가능	업체선정	*	➀용역발주 및 계약 ➁타당성조사보고서작성 ➂심사의뢰 ➃심사위원회개최 ➄결과통보	- 건설엔지니어링사업자 수행 필수 (건설기술진흥법 제47조)
	보고서작성	*		- 건설공사 타당성 조사지침
	국토부심사	*		- 국토부 기술정책과 심사
❺공유재산심의회		*	- 시에서 진행
❻공유재산관리계획심의		*
최종 예상 기간		*****

붙임 3	사업비 조정 세부내용

□ 사업비

(단위: 억원)

구 분	투자심사 (A)	기본설계 (`22.8.)	조 정 안 (B)	증 감 (B-A)	비 고
연면적(㎡)	*****	******	*****	******	************
공사비 (천원/㎡)	******	*****	*****	******	*************************
총공사비	***	***	***	****	************
설계비	**	**	**	**	******
감리비	**	**	**	***	******************
의료장비 및 집기비품 구입	**	**	**	*
기 타	*	**	**	**
보상비	**	**	**	*
계	***	***	***	***	***************

※ ************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 물가상승분 적용

ㅇ 공사비 물가상승분 적용시점: `**********************

ㅇ 물가상승분 적용 기준: *******************

붙임 4	응급의료센터 이전 검토

□ 사업계획 검토

- ************************************************************************************

- **********************************

□ 장단점 비교

구 분	장 점	단 점
기본설계(안) 응급센터 이전	********************************	********************** *************************
조정(안) 응급센터 미이전	*******************************************	****************** *******************

□ 타 사례 검토

- *************************************************************************************************

□ 타당성조사 용역 시 검토(안)

1안 (응급부 중심, 응급의료센터 이전)	2안 (권역 감염병, 응급의료센터 미이전)
************************************ **************************************** ******************************************************** *************************************** ****************************** **********************************	*********************************** ************************** *************************************

※ ***************************************************************