아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(송전관로 이설공사 관련 업무 철저 지시)

1.업무지시현장 : 영동대로 지하공간 복합개발 4공구 건설공사(토목) 현장

2.작 성 일 자 : 2023-03-08 11:03:41

3.지 시 내 용

가. 아래 문서와 관련입니다.

- 도시기반시설본부-22-9549(22.07.05)

- 도시기반시설본부-22-12704(22.09.15)

- 도시기반시설본부-22-14195(22.10.17)

- 도시기반시설본부-22-14902(22.10.28)

- 도시기반시설본부-23-18897(23.01.09)

나. 상기 업무지시전 관련하여 「영동대로 지하공간 복합개발 4공구 건설공사(토목)」 도급계약에 포함된 송전관로 적기 이설을 통한 기존 전력구 철거를 위하여 수차례에 걸쳐 송전관로 최종 설계도서 및 타지장물과 연계한 송전관로 이설공사의 공정계획을 요청하였습니다.

다. 하지만, 현재까지 1구간(전력구 종점맨홀~삼성역사거리) 설계도서과 공정계획이 제출되지 않아 향후 공사계획에 큰 차질이 우려되어 엄중 경고하오니, 건설사업관리단은 현정 공정관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

[붙임]  업무지시전 1식.  끝.

주무관	김태진		복합개발토목과장	03/08
이승우
협조자
시행	영동대로복합개발추진단-2280	(	2023. 3. 8.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 3층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2824	/전송	02-6438-2805	/	taejinv2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)