문서번호	기전과-3153
결재일자	2023. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		03/10
		代박신범
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「개포4단지 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「개포4단지 주택재건축정비사업 중 교통안전

시설물 설치공사(신호, 표지)」

2023. 3. 10.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

개포4단지 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지) 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 승인 통보(신호)

ㅇ 동부도로사업소 기전과-31133호(2022.11.24.)

□ 원인자부담공사 승인 통보(표지)

ㅇ 동부도로사업소 기전과-960호(2023.01.20.)

□ 원인자부담공사 변경승인 요청 1차(신호)

ㅇ ********************************************

□ 원인자부담공사 변경승인 요청 1차(표지)

ㅇ ********************************************

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 개포4단지 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)

□ 공사위치 : 강남구 개포동 189

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	********** ***********	***** *****	********	********
표 지			**********

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	*****************	*****************	신호, 표지

□ 변경사유 : 전기안전진단 및 기능검사 지연과 토목공사 설계변경으로 인한 준공기한 연기

Ⅳ		검토 의견

□ 변경승인 서류를 검토한 결과 적정하여 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 감리사 서류 1부.

6. 공사담당자 현황 1부.  끝.