문서번호	급수운영과-4088
결재일자	2023. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		서부수도사업소장
김동하	박상열	代박상열		03/10
				김정일
협 조

『저촉 상수도관 이설』에 따른

야간공사 시행계획 보고

(서대문구 홍은동 4@@번지 일대)

2023. 3. 9.(목)

서부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『저촉 상수도관 이설』에 따른

야간공사 시행계획 보고

서울도시가스로부터 저촉 상수도관 이설요청에 따른 단수 및 야간공사 시행계획을 보고드림.

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 2022년 서대문구 관내 상수도공사

ㅇ 공사위치: 서대문구 *********

ㅇ 공사개요: 상수도관 이설(D=150㎜, L=3m)

ㅇ 공사일시: 2022. 3. 10.(금) 20:00 ~ 익일 06:00 (야간)

ㅇ 위치 현황도 및 사진

□ 수계현황

ㅇ 급수계통

***** ****	********	**** ***	********	*****

□ 단수개요

ㅇ 단수지역: 서대문구 ******************

ㅇ 단수세대: 24세대

ㅇ 단수일시: 2023. 3. 10.(금) 23:00 ~ 익일 02:00(3시간)

ㅇ 단수계획도

ㅇ 제수밸브 조작 내용

구 분	위 치	밸브용도(형식)	밸브규격	밸브개패	담 당
*	**********	*******	***	*****	*** *** ***
*	***********	*******	***	*****

ㅇ 퇴수 조작 내용

구 분	위 치	밸브용도(형식)	밸브규격	담 당	비고
*	**********	***	***	*** *** ***	*************
*	***********	***	***

□ 행정사항

소 속	근무자	근무 일자	근무 내용	비고
급수 운영과	이훈섭	2023. 3. 10.(금) 20:00 ~ 익일 06:00	- 단수 및 통수 시 제수밸브 조절 - 정비공사를 위한 밸브 및 시설점검 - 통수 전 밸브 조절 및 퇴수 실시 - 통수 시 수질 상태 실시간 점검 및 모니터링 실시 - 공사장 안전관리 실태 점검 - 돌발 상황대비 비상근무 등	초과근무 (8시간)
	김동하
	심기진
	이중관

ㅇ 홈페이지 단수안내 게재

ㅇ 단수안내부 배포 및 부착

ㅇ 비상상황 발생 시 신속한 상황보고 체계 유지 철저

ㅇ 공사 안내간판 및 라바콘 설치 철저

붙임  단수안내문 및 단수계획서 1부.  끝.