문서번호	시설개선과-2134
결재일자
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
한원균	김현곤	이균형	03/11 오종범
협 조
	운영기획과장		박대군

봄 맞이 조경분야 환경정비 추진계획

2023. 3. 10(금)

체육시설관리사업소

(시  설  개  선  과)

봄 맞이 조경분야 환경정비 추진계획

잠실종합운동장 봄 맞이 조경분야 환경정비를 실시하여 안전사고 예방 및 이용객들에게 쾌적한 환경을 조성하고자 함

1		추진방향

□ 조경시설물 내 ․ 외부 청소로 깨끗한 시설 제공

□ 노후 시설물 점검 및 보수, 정비로 쾌적한 이용환경 조성

□ 녹지대 수목, 초화 등 유지관리로 미관 향상

□ 직원 및 공무직, 기간제노동자 등 모두 참여하는 대청소 실시

2		추진계획

□ 기    간: 2023. 3. 10. ~ 4. 30.

□ 대    상: 종합운동장, 녹지대, 파크골프장, 풋살경기장, 조경시설물 등

□ 참여인원: 총 23명(직원 6명, 공무직 5명, 기간제 12명)

□ 시행 방법

○ 봄맞이 대청소(조경반) : 3. 13. ~ 3. 14.

○ 자체 시행(경미한사항) : 3. 30. 까지 추진

○ 도급 시행(예산 사항) : 4. 30. 까지 추진

□ 추진 내용

○ 조경실, 장비실, 자재창고 등 시설물 청소, 정돈 및 정비

○ 중대재해처벌법 관련 안전 위험요소 사전제거 및 정비 시행

○ 잔디, 수목, 초화 등 생육 도모 및 유지관리 철저

○ 노후 시설물에 대한 점검 및 정비 실시

○ 예산이 수반되는 사항은 도급시행 및 경미한 사항은 자체정비

3		세부 추진계획

① 조경실, 장비실, 창고 등 대청소 (자 체) ⦁ 대 상: 조경실, 장비실, 자재창고 ⦁ 내 용: 먼지제거, 청소 및 물품 정리 ⦁ 기 간: '23. 3.13. ~ 3.14. ⦁ 소요예산: 비예산
② 종합운동장 녹지대, 잔디 청소 및 정비 (자 체) ⦁ 대 상: 잠실종합운동장 녹지대 ⦁ 내 용: 청소 및 급수작업, 시설물 보수 등 ⦁ 기 간: '23. 3. 8. ~ 3.31. ⦁ 소요예산: 비예산
③ 파크골프장 잔디 관리 및 정비 (자 체) ⦁ 대 상 지: 파크골프장 ⦁ 내 용: 청소, 잔디교체, 급수 등 ⦁ 기 간: '23. 3.10. ~ 3.31. ⦁ 소요예산: 비예산
④ 풋살경기장 인조잔디 관리 (자 체) ⦁ 대 상 지: 풋살경기장 3개소 ⦁ 내 용: 점검 및 하자보수 통보 ⦁ 기 간: '23. 3.10. ~ 4.30. ⦁ 소요예산: 비예산
⑤ 조경시설물 세척 및 도색 (자 체) ⦁ 대 상 지: 조경시설물 250점 ⦁ 내 용: 오일스테인 등 도색작업 ⦁ 기 간: '23. 4. 1. ~ 4.30. ⦁ 소요예산: 3백만원
⑥ 야외 운동기구 점검 및 정비 (자 체) ⦁ 대 상: 야외운동기구 18점 ⦁ 내 용: 시설물 청소 및 가동 점검 ⦁ 기 간: '23. 3.10. ~ 3.31. ⦁ 소요예산: 비예산
⑦ 분수시설 주변 청소 및 점검 (자 체) ⦁ 대 상: 주경기장, 학생체육관 옆 ⦁ 내 용: 청소 및 점검 등 ⦁ 기 간: '23. 3.10. ~ 4.10. ⦁ 소요예산: 비예산
⑧ 종합운동장 봄철 꽃묘 식재 (자 체) ⦁ 대 상: 실내체육관 등 5개소 ⦁ 내 용: 가자니아 등 꽃묘 3,000본 식재 ⦁ 기 간: '23. 3.20. ~ 4. 6. ⦁ 소요예산: 3백만원
⑨ 기계장비 점검 및 정비 (자 체) ⦁ 대 상: 트랙터 등 장비 120점 ⦁ 내 용: 노후여부 점검 및 보수, 정비 ⦁ 기 간: '23. 3.10. ~ 3.31. ⦁ 소요예산: 비예산
⑩ 효창운동장 인조잔디 교체 (도 급) ⦁ 대 상 지: 효창운동장 ⦁ 내 용: 인조잔디교체, 폐기물 재활용 용역 등 ⦁ 기 간: '23. 3. 7. ~ 3.31. ⦁ 소요예산: 812백만원
⑪ 위험수목 가지치기 (도 급) ⦁대 상 지: 남문 및 외곽 경계부 ⦁ 내 용: 위험수목 예방 강전정 시행(2.28.) ⦁ 기 간: '23. 2. 9. ~ 3.17. ⦁ 소요예산: 44백만원
⑫ 종합운동장 녹지대 정비 (도 급) ⦁ 대 상: 수영장 전면 및 풋살장 주변 ⦁ 내 용: 수목 보식 및 전정 등 ⦁ 기 간: '23. 4. 1.~ 4.30. ⦁ 소요예산: 30백만원

4		추진일정

사 업 명	3월					4월						비고
	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30
조경실, 장비실, 창고 등 대청소 및 정리												자체 시행
종합운동장 녹지대 청소 및 정비
파크골프장 잔디관리 및 청소
풋살경기장 인조잔디 관리 및 점검
조경시설물 세척 및 도색
야외운동 기구 점검 및 정비
분수시설물 주변 점검 및 정비
종합운동장 봄철 꽃묘 식재
기계장비 점검 및 정비
효창운동장 인조잔디 교체												도급 시행
위험수목 전정
종합운동장 녹지대 정비

5		행정사항

□ 조경분야 환경정비 이행사항 결과보고

□ 물품 조서 및 수급대장 등 관련 서류 작성 . 끝.