문서번호	친환경건물과-3136
결재일자	2023. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공건물효율화팀장	친환경건물과장
김순곤		이원재	03/10
			최종하
협조
	주무관		장천섭

북부기술교육원 ZEB 전환 리모델링 설계용역 변경계획 보고

2023. 3.

기후환경본부

(친환경건물과)

북부기술교육원 ZEB 전환 리모델링 설계용역 변경계획

「북부기술교육원 ZEB 전환 리모델링 설계용역」과 관련하여 신재생에너지(지열시스템) 설계 추가 반영에 따른 용역 수행기간이 부족하여 원할한 설계진행을 위해 용역기간을 연장(15일) 하고자 함.

Ⅰ		용 역 개 요

구 분	내 용	비고
설계용역명	북부기술교육원 ZEB 전환 리모델링
대상건물(규모)	본관(1,991㎡)
위 치	노원구 덕릉로70가길 81
***	*************
****	***********
****	********************

Ⅱ		추 진 경 과

○ '21. 10. 28  : 「'22년 공공건물 ZEB 전환 사업계획」(기후변화대응과-14417호)

○ '21. 3 ~ 4월 : 기술용역 타당성 심사

○ '22. 4. 11     : 시 소유 건물 ZEB 전환 리모델링 설계용역 시행계획

○ '22. 4. 27    : 설계용역 계약 및 착수

○ '22. 7. 1     : 내진설계 반영 협조요청(일자리정책과 → 기후변화대응과)

○ '22. 7. 28    : 설계용역 변경계획 (기후변화대응과-25932호, 1차)

○ '22. 11. 18  : 설계용역 변경계획 (친환경건물과-3960호, 2차)

○ '23. 2. 15   : 지열시스템 설계반영 요청(용역 중간보고 시)

Ⅲ		용역사 용역변경 요청

*********************************

*************

*******************************************************************************************

Ⅳ		검 토 결 과

******************

**************************************************

Ⅴ		계 약 변 경

○ 근거 : 지방자치단체 용역계약 일반조건 Ⅵ(과업내용의 변경 및 계약금액의 조정)

○ 변경내용 : 용역기간 연장

*********************************************

○ 계약변경(용역비 및 용역기간)                                             (단위 : 원)

용역대상	구 분	당 초	변 경	증 감
******* ****	***	**********	****	*
	****	*****************	*****************	*****

※ 설계용역비는 추후 산출된 공사비를 감안하여 추가반영 예정

Ⅵ		행정사항

○ 북부기술교육원 ZEB 전환 리모델링 설계용역 계약변경 의뢰(재무과)

○ 북부기술교육원 ZEB 전환 리모델링 설계용역 준공('23.3.23.)

붙임  용역사 변경계약 요청 공문 1부.  끝.