문서번호	토목부-4506
결재일자	2023. 3. 13.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		이성주	03/13
			이임섭
협조
	주무관		이상현

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

설계변경(전체6회, 2차3회)검토 보고

2023. 03.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

설계변경(전체6회, 2차3회)검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 설계변경(전체6회, 2차3회) 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근   거

○ 공사 설계변경(전체6회, 2차3회) 검토결과보고(보행교) - 감리부-23-00411호('23.03.10.)

□ 공사개요

○ 사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 :  보행교 건설(연장 110.5m, 폭 10.0~15.0m)

○ 사업기간 :  '21.04.19. ∼ '24.04.18. (2차 '21. 10. 17. ∼ '23. 10. 16.)

○ 도 급 비 :  **************************

○ 시공사/건설사업단 : *****************************

□ 설계변경 사유

○ 물가변동 등 실정보고 승인사항 반영

************************************************

**********************************************

***********************************************

○ 2차공사 강교제작 등 공정추진을 반영한 시공수량 조정

*************************************

****	**** ****	*****	*****	***	********	**** ***
***	*****	*****	*** ******** ********	*	*****	*****

□ 설계변경 내역 검토

○ 전체6회 : ******************************************

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비	**************	**************	*****************
도 급 비	**************	**************	*****************
관 급 비	*************	*************	*****************
이 전 비	**********	**********	*
공사기간	*************************	*************************	*****

(단위 : 천원)

공 종	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증. 감
토 공	*******	******	*
2. 구조물공	*******	******	*
3. 상부공	*********	*******	*
4. 가시설공	*******	******	*
5. 부대공	*********	*******	******
6. 운반공	*****	****	*
7. 사급자재	*******	******	*
직접비 계	*********	*********	******
간접비	*********	*********	*****
물가상승(K1=6.76%)	*******	*******	*
물가상승(K2=3.28%)	*******	*******	*
물가상승(K3=3.15%)	*******	*******	*
물가상승(K4=4.41%)	*	*******	*******
제경비제외공종	*******	*******	******
공급가액	**********	**********	*******
부가가치세	*********	*********	******
도 급 액	**********	**********	*******

○ 2차3회 : ******************************************

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비	*************	*************	*****************
도 급 비	*************	*************	*****************
관 급 비	**********	***********	*****************
이 전 비	*	*	*
공사기간	*************************	*************************	*****

(단위 : 천원)

공 종	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증. 감
1. 토공	*****	******	******
2. 구조물공	*******	*******	******
3. 상부공	*********	*********	*******
4. 가시설공	******	******	******
5. 부대공	*******	*******	*******
6. 운반공	*	***	***
7. 사급자재	*	***	***
직접비 계	*********	*********	*********
간접비	*******	*********	*******
물가상승(K1=6.76%)	*******	*******	******
물가상승(K2=3.28%)	******	*******	******
물가상승(K3=3.15%)	******	*******	******
물가상승(K4=4.41%)	*	*******	*******
제경비제외공종	******	******	******
공급가액	*********	*********	*********
부가가치세	*******	*******	*******
도 급 액	*********	*********	*********

○ 주요 물량 증·감 내역(2차3회)

- 2차공사 공정추진에 따른 강교제작 및 운반 등 시공수량 조정

공 종	단 위	***		***	비 고
		***	***
구조물터파기	㎥	*****	*****	**********
되메우기및다짐	㎥	*	*****	**********
콘크리트타설	㎥	**	***	**********
철근가공조립(복잡)	톤	*	******	**********
철근가공조립(매우복잡)	톤	******	*****	**********
강교제작	톤	*****	*******	**********
강교운반	톤	*	*******	**********	광주 → 현장
강교가설	톤	*	***	**********
교량받침	개소	*	*	**********
가설벤트(아치리브)	식	*	*	**********
가설벤트(상부)	식	*	*	**********
스마트안전기술	식	*	*	**********

□ 조치계획

○ 실정보고 승인사항 및 2차공사 공정추진에 따른 시공수량 조정을 반영한

사항으로 상기 검토결과 같이 설계변경 및 변경계약을 시행하여 사업추진에

만전을 기하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 설계변경 검토 보고서 각 1부. 끝.