문서번호	도로관리과-4653
결재일자	2023. 3. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로관리팀장	도로관리과장
손창수		윤인식	03/13
			이정화
협조

계약변경(계약수량) 검토 보고

「염수분사장치-램프제설작업 구매」

계약변경(계약수량) 검토 보고

2023. 3.

안 전 총 괄 실

(도로관리과)

「염수분사장치-램프제설작업 구매」

계약변경(계약수량) 검토 보고

겨울철 강설 시 제설취약구간 제설작업을 위한 "염수분사장치 구매"건의 계약변경(계약수량) 검토 보고임

□ 사업개요

ㅇ 계 약 명 : 염수분사장치-램프제설작업 구매

ㅇ 계약수량 : 총 7대

ㅇ 계약금액 : 881,281천원

ㅇ 계 약 일 : '22.11.15.

ㅇ 계 약 자 : 리텍 주식회사(세종시 연동면 명학산단남로 62)

ㅇ 계약기간 : '22.11.15. ~ '23.3.15.

□ 추진경위

ㅇ '22.10.31.	방침 수립

ㅇ '22.11.01.	재난관리기금운용심의회 심의 요청

ㅇ '22.11.07.	'22년 제14차 재난관리기금운용심의회 심의(원안가결)

ㅇ '22.11.14.	염수분사장치 물품 구매 의뢰

ㅇ '22.11.15.	계약 체결

ㅇ '23.03.현재	총 5개지역 7개소 설치 완료(공정률 100%)

- 영동대교 남단 H, I 램프, 한남대교 북단 B램프, 서강대교 북단 A, B 램프, 개포지하차도, 일원지하차도

□ 검토내용

ㅇ 계약수량 변경

- 변경내용

구 분		당 초	변 경	증·감
계약수량	본체	7대	6대	감) 1대
	배관	29대	120대	증) 91대
계약금액		881,281,000원	828,918,000원	감) 52,363,000원

- 변경사유

·구조적으로 취약한 교량 램프 및 지하차도 진출입로 구간의 선제적 제설작업을 위해 필요한 장비로,

·설치장소 현장 여건(차로폭, 램프연장)을 반영한 계약수량 증‧감

□ 조치의견

ㅇ 상기와 같이 검토된 물품 구매 계약수량 변경을 재무과로 의뢰하여 변경계약 시행 후

ㅇ "염수분사장치-램프제설작업 구매" 건에 대하여 준공처리코자 함

붙임  1. 계약변경 사유서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.