문서번호	토목부-4549
결재일자	2023. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
노승환		박장진	03/14
			이임섭
협 조
	주무관			홍현기

관급자재(레미콘) 수급방법(관급→사급) 변경 검토보고

- 청계천~정릉천 자전거도로 연결공사 -

2023. 03.

도시기반시설본부

(토    목    부)

관급자재(레미콘) 수급방법(관급→사급) 변경 검토보고

- 청계천~정릉천 자전거도로 연결공사 -

『청계천~정릉천 자전거도로 연결공사』공사중 레미콘 관급 수급이 불가하여 원활한 공정관리를 위한 관급자재 수급방법 변경 검토 보고드림.

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 청계천~정릉천 합류부(고산자교 ~ 용답역 인근)

○ 규    모 : 신설 자전거도로, 연결교량 및 자전거도로 정비

○ 기    간 : 2022.01.01. ~ 2023.05.31.

○ 도 급 비 : 1,825백만원

○ 시 공 사 : 태궁종합건설(주)

Ⅱ		검토내용

□ 주요 검토내용

******************************************

*********************************************

구 분	검 토 내 용		비고
도로경계석 설계도면		경계석	정비구간 (L=1,140m) 수량 = 105 ㎥
전환사유	******************************************************************************************************************

구 분	검 토 내 용	비고
교량구조물 설계도면		교량 1개소 수량 = 408 ㎥
전환사유	*********************************************************************************************************** ********************************************* ******************************************

□ 수량 및 공사비 증·감

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
레미콘	********	*	***	*	****
	********	*	*	*	**
	*********	*	*	*	**
	*********	*	***	*	****
	*********	*	**	*	****
	*********	*	***	*	****
	********	*	***	*	****
	********	*	*	***	***	**
	********	*	*	*	*	**
	*********	*	*	*	*	**
	*********	*	*	***	***	**
	*********	*	*	**	**	**
	*********	*	*	***	***	**
	********	*	*	***	***	**

구 분	당 초	변 경	증 · △감	비 고
*********	*	******	******
*******	*	******	******
*******	*	******	******
*****	******	*	*******
*******	******	******	******

□ 적용단가 검토

********************************************

*********************************************

********************************

Ⅲ		조치계획

ㅇ  『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 소요자재의 수급방법 변경건으로 **************************************************************************** 실정보고를 승인 후 설계변경에 반영코자 함.

붙임  감리단 실정보고 검토보고서 1부.  끝.