급수공사 연기 보고서(신설-82)

시    행

급수운영과-4100

시행일자

2023. 3. 14.

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

대시민공개

주무관		급수관리팀장	급수운영과장			결재
송정호		양봉우	03/14
			이규희
협 조

명에 의거 삼전동 외 11개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 공사현황

○ 공사명: 2022년 삼전동 외 11개동 상수도공사

○ 계약상대자: 다성엔지니어링(주)  대표 임규성

□ 연기내역

연번	주 소	지시번호	당초	변경	비고
1	석촌동 174-10	신설-82	2023. 3. 3.~ 2023. 3. 14.	2023. 3. 3.~ 2023. 3. 27.

○ 연기사유

- 내부공사 지연으로 인하여 상수도공사가 불가하여 공사 연기

□ 지체상금 부과여부

○ 지체상금 미부과

□ 조치의견

○ 변경 공사기간으로 연기

붙임  급수공사 연기원 1부(별첨).  끝.