문서번호	치수과-3885
결재일자	2023. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장	안전건설교통국장
박철홍		김경원		代김경원	03/14
					代이경생
협조
	재무과장		김영규
	계약팀장		황미란

계약기한 연기 계획(행당-5 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 2차)

「행당-5 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 2차」

계약기한 연기 계획

2023.  3.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√]( 시비, 공기업하수도사업특별회계 ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「행당-5 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 2차」

계약기한 연기 계획

방재성능목표 상향 및 자문회의 보완사항 반영을 위한 『행당-5 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 2차』의 계약기한을 연기하고자 함

□ 추진근거

○『소구역 하수관로 정비사업』 설계빈도 상향추진 등 업무처리 철저요청

[서울특별시장 제193호, 물재생계획과-30794(2022.11.2.)]

○ 기본 및 실시설계용역 자문회의 결과(2차)

[치수과-2250(2023.2.14.)]

□ 용역개요

○ 용 역 명: 행당-5 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 2차

○ 기    간: 2022.1.4.(착수 1.4.)~2023.3.29.

○ 위    치: 행당-5 소구역(응봉동 일대)

○ 내    용: 하수관로 정비 기본 및 실시설계

○ 도 급 비: 226,171천원(총차 396,371천원)

○ 용 역 사: ㈜화신엔지니어링 대표 최기영 외 1개사

□ 보고내용

○ 용역의 내실화를 위한 계약기한 연기

- 설계빈도 상향에 따른 과업수행 추가 소요기간 필요

- 2차 자문회의 결과 보완사항 반영을 위한 추가 소요기간 필요

- 설계안정성 검토 결과 평가 의뢰 소요기간 필요

- (당초)'23.3.29. → (변경)'23.4.29.(1개월 연기, 용역사 귀책사유 해당없음)

○ 과업 계약금액 및 물량

- 변경 없음

□ 향후계획

○ 2023.3.15. 변경계약(계약기한 연기) 요청(치수과 → 재무과)

○ 2023.3.21. 3차 자문회의 개최

○ 2023.3.31. 3차 자문회의 보완사항 반영

○ 2023.4.20. 설계도서 작성 및 서울시 성과품 협의

○ 2023.4.29. 용역 완성

붙임  1. 관련공문(설계빈도 상향추진) 1부.

2. 2차 자문회의 결과 1부.

3. 변경계약합의각서 1부.  끝.