문서번호	급수운영과-4933
결재일자	2023. 3. 16.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장	중부수도사업소장
김종수		김상웅	03/16
			장청락
협 조

공사 발주금액 정정 계획(안)

〔2023년 중부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)〕

2023.  3  16. (목)

중부수도사업소

(급수운영과)

공사 발주금액 정정 계획(안) 〔2023년 중부수도사업소관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)〕
중부수도사업소	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수관리팀장(담당) :김종수☎2160

금년도 신규발주 사업인『2023년 중부 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)』에 대하여 본청 계약심사 완료된 상태나, 원가계산 제비율 적용에 오류가 있어 발주 금액을 정정코자함

□ 관련 근거

○ 단가계약 공사 발주계획 보고: 급수운영과-4169호(2023. 3. 6.)

○ 계약심사 결과 알림: 계약심사과-4149호(2023. 3. 9)

□ (발주)공사 개요

○ 공 사 명: 2023년 중부 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)

○ 공사내용: *****************************************

○ 공사기간: 착공일로부터 ~ 2024. 6. 30.까지

○ 계약심사 요청(도급)액: ******************************

□ 계약심사 결과(본청 계약심사과)

○ 계약심사 요청: 2023. 3. 7. 급수운영과→본청 계약심사과

○ 계약심사 결과 통보: 2023. 3. 9. 본청 계약심사과→급수운영과

(단위: 천원)

심사요청액(A)	심사금액(B)	조정액(C=A-B)	조정율(C/A)
*********	*********	******	*****

- 주요 심사내용

▶ 자재단가(컨테이너 외 7종) 조정

▶ 일위대가(돌보도 포장 등) 재산정

□ 발주금액 정정

○ 정정사유

- 금년도 신규발주 사업인 “2023년 중부 관내 포장도로 굴착복구공사” **************************************************************하여야 하나,

- 본 공사는 ***********************************************************************************************************************************됨에 따라,

- 착오 적용된 제비율 요율을 아래와 같이 정정코자 함

○ 정정개요

- 원가반영 제비율 요율 착오 적용 항목

(단위: 천원)

명칭	제비율 산출식 및 발주금액 정정		증감
	(당초)계약 심사 및 조정액 (공사규모 5억~30억 미만)	(정정)발주금액 (공사규모 30억 이상)
계	*******	*********	********
일반관리비 요율	******************	******************	********
주휴수당 원가반영 요율	***************** *********	***************** ********	********

- 적정 제비율 반영 시 발주(도급)금액: ***********

※ 설계(수정) 내역서: 붙임

□ 조치 계획

○ 정정된 (도급)금액으로 공사발주 및 본청 재무과 계약 의뢰: '23. 3. 20.

붙임: 1. 발주방침 및 본청 계약심사 결과 통보서 각 1부.

2. 원가계산 제비율 적용 기준 1부.

3. 설계내역서(수정) 1부. 끝.