문서번호	시설과-1671
결재일자	2023. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장		동부공원여가센터소장
임혜경	호명옥	김달용		전결 03/16
				김인숙
협 조	공원관리팀장		허현수
	공원운영과장		유병오

「응봉공원 무장애 친화공원 조성 설계용역」

설계변경계획 및 기간연장 검토보고

2023. 3.

동부공원여가센터

[ 시   설   과 ]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「응봉공원 무장애 친화공원 조성 설계용역」

설계변경계획 및 기간연장 검토보고

우리 센터에서 시행 중인 「응봉공원 무장애 친화공원 조성 설계용역」과 관련, 아래와 같이 설계변경 및 기간연장을 검토하여 보고 드림

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 응봉공원 무장애 친화공원 조성 설계용역

❍ 위    치 : 성동구 금호로 172-1 일대(대현산배수지)

❍ ****************************

❍ 사업면적 : 75,570㎡

❍ 사업내용 : 교통약자를 위한 공원시설 접근성·안전성 개선, 노후시설물 정비 등

❍ *******************

❍ *********************************

❍ *************************

Ⅱ		추진경위

❍ 2022.11. 9. : 설계 착수

❍ 2022.11.17. : 현장 자문회의(1차) 개최

❍ 2022. 1. 30. : 설계 중간 보고

❍ 2023. 2.  9. : 설계(안) 자문회의(2차) 개최

Ⅲ		설계변경계획

❍ 추진근거 : 대현산배수지 정밀안전진단용역 시행 결과 알림

(동부수도사업소 급수운영과-2327(‘23.2.3.)호)

❍ ****

- *******************************************************************

- *****************************************************************************************

❍ 변경내역

**	*******			**
	**	**	**
***** ******	**********	**********	***********	***************

- ***************************

Ⅳ		준공기한 연기검토

□ 검토사유 : 준공기한의 연기

□ 연기사유

❍ ******************************************************************************************************

□ 준공기한 변경

❍ *********************************

❍ ******************************************

□ 지체상금 부과여부 : 용역사에 귀책사유 없는 기간연장으로 미부과

Ⅴ		조치계획

❍ *****************************************************

붙임  1. 대현산배수지 정밀안전진단용역 시행 결과 알림 공문 1부.

2. 설계비 산출서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.