문서번호	정수시설과-759
결재일자	2023. 3. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
손영일		최병희	03/17
			代정종철
협 조
	행정관리과장			정종철

설계변경 시행 보고

[2022년 전기설비 유지보수공사(연간단가)-2차]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 03.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 시행 보고

[2022년 전기설비 유지보수공사(연간단가)-2차]

2022년 전기설비 유지보수공사(연간단가 2차계약)」시행 중 설계변경 사항이 발생하여 다음과 같이 변경 시행하고자 함.

Ⅰ				공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2022년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

□ 공사기간 : 총차 - 2022.04.25. ~ 2023.03.31.

2차  - 2023.01.01. ~ 2023.03.31.

□ 계약금액 : 금119,118,190원(2차 : 19,118,190원)

□ 도 급 자 : (주)코리아에너텍  대표 이창근

□ 공사내용 : 전기설비 유지보수 공사 1식

Ⅱ				설계변경 내용

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	계약금액		증·감액
	당 초	변 경
총 차	***********	***********	************
1차계약(준공완료)	***********	***********	*
2차계약	**********	**********	************

※ 물량증감 및 신규공종 추가, 산업안전보건관리비 및 보험료 정산

□ 적용단가

○ 기존단가 : 계약단가 적용

○ 신규단가 : 낙찰율 (87.745%) 적용

□ 주요 변경내용(2차)

공 종	주요 변경사항	사 유
전기설비 유지보수공사	*********** ************* ********* ******************* ********************************* ******************************** ******************** ******************************* *********************	********** ************************ ********* ********** ****

Ⅲ				향 후 계 획

□ 2022년 전기설비 유지보수 공사 설계변경 사항에 대한 심의위원회를 개최하고, 심의결과에 따라 설계변경 시행

□ 추진일정

○ 심의위원회 개최 및 보고 : 2023.03.20.

○ 설계변경 시행 : 2023.03.20.

붙임 : 설계변경 내역서(총차,2차) 1부. 끝.