문서번호	빅데이터담당관-20066
결재일자	2022. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	빅데이터인프라팀장	빅데이터담당관		스마트도시정책관
오재욱	유혜정	이수재		03/22
				박종수
협 조
	주무관		권재욱

2022년 서울시 빅데이터 통합저장소 운영계획

2022. 3.

스마트도시정책관

[빅데이터담당관]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 서울시 빅데이터 통합저장소 운영 계획

공공데이터 통합관리 거버넌스 체계 구축 및 데이터 활용을 통한 과학행정 추진을 위해 (1단계) 구축된 빅데이터 통합저장소를 안정적으로 운영하고, 하드웨어 등 제반인프라를 효율적으로 관리하기 위해 운영사업을 추진코자 함.

1		사업개요

****************************************

***********************************

*******************************

****************************************

제안요청서 확정	⇒	입찰공고	⇒	제안서 평가	⇒	계약체결
(3월 중)		(4월 중)		(4월 중)		(월 중)

2		운영 성과('21.9.~'22.1.)

□ 데이터 검색 서비스 기능 개선

○ 42건의 기능개발 및 오류수정으로 검색서비스의 편의성, 안정성 향상

▸ 데이터 다운로드 UI 개선, FTP를 이용한 서버에 데이터제공, 웹로그 기능 추가,
보안 취약성 개선(비밀번호 5회), 시점 및 건수별 필터기능 추가 등

□ 검색 대상 확대

○ (개선 전) 데이터, 데이터셋 → (개선후) 메타데이터 추가

▸ ‘21.12.08. 기준: 데이터(7,624건), 데이터셋(2,014건), 메타데이터(122,432건)

□ 수집 데이터 품질 관리

○ 활용가치가 낮은 원천데이터 삭제(1,496종) 및 추가수집 중단(1,659종)

⇒ 현재 5,965종 데이터 수집 중, 검색서비스에서는 7,624종 검색 가능

○ 테이블명 한글화 : 약 2,700건 한글화

□ 운영 안정화 및 장애 예방 활동

○ 지속적인 운영관리로 오류 감소 (7월 1,647건 → 11월 240건)

○ 장애 예방 활동 수행: 인프라 정기점검, 네트워크 이중화 테스트 등

3		'22년 운영 계획

□ 추진방향

○ 데이터 검색서비스 기능 개선 및 오픈

- 데이터 검색, 공유, 다운로드 기능 개선 및 서비스 오픈

- 데이터 설명 및 테이블/컬럼명 한글화는 지속적 개선 추진

※  '2단계 빅데이터 서비스 플랫폼 구축사업' 사업에서 개선 과업 수행

○ 통합저장소 메타데이터 현행화 및 행정안전부 범정부 데이터 통합관리 플랫폼(이하, '범정부 데이터 플랫폼')과 연계 추진하여 업무프로세스 개선

※ 범정부 데이터 플랫폼: 데이터기반행정법에 따라 행안부에서 데이터공동활용 촉진을 위해 공공데이터의 소재와 메타데이터 정보를 통합 관리하는 시스템

○ 교통 빅데이터 플랫폼 데이터 연계 지원하여 통합저장소 활용 다각화

- 교통정보과에서 요청한 수집대상(358개 테이블) 중 공개 가능한 테이블(49개 테이블, 시청 내부 공개, 별도 협의 필요) 우선하여 수집 및 제공

⇒ 실국에서 유용하다고 판단한 데이터를 수집함으로써 향후 통합저장소 활용성 증대 가능

□ 세부 추진 과업

1) 시스템의 연중(365 X 24) 안정적 운영

○ 인프라(H/W, N/W)의 상태 모니터링, 장애지원 및 정기점검(월1회)

○ N/W 스위치 관리전환을 위한 케이블 포설(UTP GBIC, 케이블 포함)

※ 방화벽 2식, N/W 스위치 2식: ’22.6. 서초데이터센터에 관리전환 예정
(방화벽은 케이블 포설 기 완료, N/W 스위치 2식 케이블 포설 추가)

○ 유상 유지보수 인프라: H/W 6종 6식, S/W 1종 81식, N/W 15종 40식

▸ 패키지 구매 방식의 S/W(ETL, 비식별화 등)는 유지보수 대상에서 제외*******

▸ 상암 클라우드센터 입주대상 서버에 대해 OS(Redhat) 비용 추가*******

※ 무상 유지보수 기간 종료 후 유상 전환: H/W 5종, S/W 10종, N/W 17종

2022년 유지관리 대상	수량	유지관리금액 (단위: 원)
합계		************
하둡 관리 스위치	3	**********
프론트오피스사설수집서버 집선스위치	1	**********
하둡 에코 스위치	12	***********
통합저장소 백본 스위치	2	**********
안전지대 백본 스위치	2	**********
원천데이터저장소 백본 스위치	2	**********
통합저장소 침입차단시스템	2	**********
안전지대 침입차단시스템	2	**********
시설물관리시스템	1	**********
KVM스위치 및 모듈	1	**********
내부통합수집스위치	2	**********
통합저장소통합수집스위치	2	**********
내부통합수집방화벽	2	**********
백오피스KVM스위치(KN)	1	**********
외부통합수집스위치	2	**********
망간스위치	2	**********
외부수집집선스위치	2	**********
외부통합수집방화벽	2	**********
프론트오피스KVM스위치(KN)	1	**********
백오피스KVM스위치(KN)	1	**********
프론트오피스KVM스위치(SN)	1	********
REDHAT Enterprise Linux Server	81	***********

2) 원천데이터, 메타데이터, 데이터셋의 안정적 수집 및 적재

○ 1단계 수집 (메타)데이터, 데이터셋의 지속 모니터링 및 현행화

○ 원천데이터 제공방식 변경(항목, 수집주기, 연계방식 변경 등)에 따른 조치

○ 개인정보 식별검출 모니터링 및 프로그램 보완, 재추출 작업 등

○ 교통 빅데이터 플랫폼 등 데이터 연계 지원 및 신규 데이터 수집

3) 통합저장소 메타데이터 현행화 및 범정부 데이터 플랫폼과 연계

○ 신규 구축 시스템 및 범정부 데이터 플랫폼 개별등록 메타데이터 추가수집

- '21년 구축 완료된 40여개 시스템('22.3.2. 범정부EA 기준) 메타데이터

- 범정부 기관메타의 개별등록 32개 시스템 메타데이터

○ 기 등록한 메타데이터 현행화

- 자동 수집하는 9개 항목(영문 테이블명, 컬럼 데이터 타입, 길이 등)을 포함한 서울시 메타데이터 관리항목(92개, 행안부 관리항목 43개 포함) 입력누락항목 재정비 및 변경 분 업데이트

※ 실국 시스템 담당자 메타데이터 현행화 교육 시행

○ 범정부 데이터 플랫폼과 메타데이터 자동 연계 추진

- 공공데이터 제공 운영실태 평가를 위한 통합저장소와 범정부 데이터 플랫폼 기관메타 연계

4) 서울 데이터 검색서비스 운영관리

○ 서울 데이터 검색서비스 운영 및 유지보수

○ 데이터 다운로드, 시각화 분석 등 원활한 서비스를 위해 데이터 오류 사항 점검 및 검색엔진 안정화 등

5) 빅데이터 서비스 플랫폼 구축 지원

○ 저장소 데이터 및 메타데이터 현황 자료 작성 및 데이터 추출 지원

○ 저장소와 빅데이터 서비스 플랫폼 네트워크 연동 지원

- N/W 및 방화벽 엔지니어 1명씩 2개월간 지원

□ 소요예산 및 투입인력

*******************

************************************************

**********************************************

***********************************************************************************************************************************

○ 투입인력(28.5M/M) : 상주2, 비상주4

업무	투입기간	상세업무
빅데이터 통합저장소 운영사업 총괄	비상주, 8개월 (20%)	- 운영 사업 총괄 관리자 - 발주자, 수행팀 및 유관사업간 사업 협력 체계 구축 - 사업추진 요구사항 정의 및 협의 - 정기/비정기 보고 (주간/월간/수시 보고) - 사업관리(범위관리, 품질관리, 인력관리, 일정관리, 의사소통관리, 위험관리 등) - 보고서 및 계획서 등 각종 수행 산출물 작성 및 관리
데이터 수집/적재 운영	상주, 8개월 (100%)	- 데이터 수집 적재 모니터링 - 개인정보 검출 결과 적용 및 모니터링 - 작업프로세스 관리시스템 운영 및 스케줄 관리 - 범정부 데이터 플랫폼 연계 - 저장소 적재 데이터 관련 자료 현행화 - 빅데이터 서비스 플랫폼 구축 관련 데이터 추출 작업 지원
	비상주, 3.5개월 (100%)
H/W 인프라 운영	비상주, 8개월 (67%)	- HW, NW, 보안장비 등 인프라 정기점검 (1회 정기점검시 3일 * 9개월=1.35M/M) - 빅데이터 서비스 플랫폼 구축 관련 네트워크 설계 변경(2명 * 2개월=4M/M) - 관제용 케이블 포설(1주=0.25M/M) - 인프라 장애 처리 지원
메타데이터 현행화 지원	비상주, 2개월 (100%)	- 신규 시스템 메타데이터 수집 - 메타데이터 현행화 관련 자료 추출 및 시스템 반영
서울 데이터검색 서비스 운영	상주, 8개월 (100%)	- 서울 데이터 검색서비스 운영 및 유지보수 - 데이터 다운로드, 시각화 분석 등 원활한 서비스를 위해 데이터 오류 사항 점검 및 검색엔진 안정화 등

4		추진 일정

○ 원천데이터, 메타데이터, 데이터셋의 안정적 수집 및 적재 : '22.5.~

○ 신규 구축 시스템 메타데이터 수집	: '22.6.~

○ 방화벽 2식, N/W 스위치 2식 서초데이터센터 관리전환	: '22.6.예정

○ 범정부 데이터 플랫폼과 메타데이터 연계 기능 개발	: '22.8.예정

붙임: 1. 산출내역서 1부.

2. 제안요청서 1부.

3. '21년 신규 구축시스템 목록 1부.  끝.