문서번호	도시철도설비부-2647
결재일자	2023. 3. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
이덕우		김이곤	03/20
			전계목
협조

『별내선(8호선연장) 관급자재』 관제전화설비 실정보고 검토보고

2023.  3.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『별내선(8호선연장) 관급자재』

관제전화설비 실정보고 검토보고

별내선(8호선 연장) 관급자재 「관제전화설비」중 터널내 터널방송을 전원공급장치 추가설치에 따른 계약내역 변경 실정보고에 대한 검토 보고임

****************************************************

Ⅰ		계 약 개 요

□ 계 약 명 : 별내선(8호선연장) 관제전화설비 구매설치

□ 계 약 자 : ***************

□ 계약금액 : ***********

□ 계약기간 : ***********************

□ 감 리 단 : *****************************

Ⅱ		실 정 보 고

□ 변경대상 : 별내선(8호선 연장) 전구간

□ 변경사유

ㅇ 터널비상방송용 전원공급장치 물량변경

- 터널비상방송용 전원공급장치를 500m마다 설치가 필요하나 각 정거장에만 설치하는 것으로 설계되어 설계수량 부족에 따른 추가 설치

※ 증 8대(당초 7대 →  변경 15대)

ㅇ 현장여건반영 : 기능실용 통신랙 규격 변경

- 용역원대기실 및 운전취급실 등 기능실용 통신랙을 설치환경에 맞게당초 19인치 통신랙에서 소형랙(H515)으로 변경

□ 변경내용

ㅇ 터널비상방송 전원공급장치 물량산출

- 터널비상방송 전원공급장치 추가설치 위치

정거장명	과업 시점	BN1	~			BN2	~	BN3	~	BN4	~	BN5	~		BN6	과업 종점	합계
정거장 (m)	0K 000	1K 010				4K 615		6K 482		7K 461		9K 438			12K 474	12K 898
정거장 간격(m)	1K010		3K605				1K867		979		1K977		3K036			424
추가물량	1			2	1		1				1		1	1			8
당초물량		1	1			1		1		1		1			1		7
설치위치 (m)	0K 500	1K 010	1K 900	2K800 (상1,하1)	3K 700	4K 615	5K 500	6K 482		7K 461	8K 500	9K 438	10K 450	11K 460	12K 474

ㅇ 관제전화설비용 통신랙 규격 변경

구 분	BN1	BN2	BN3	BN4	BN5	BN6	계	비 고
통신기계실	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	6/6	19인치표준랙
용역원대기실	1/0				1/1		2/1	BN1 공조실 통신랙 공유 소형랙(H515) 변경
운전취급실		1/1					1/1	소형랙(H515) 변경
신호취급실			1/1			1/1	2/2	소형랙(H515) 변경
역무실				1/0			1/0	콘솔테이블 하단 설치 (랙 미설치)
운영사무실						1/1	1/1	소형랙(H515) 변경
PSD기계실	0/2						0/2	POE단자함 설치
합계	2/3	2/2	2/2	2/1	2/2	3/3	13/13

ㅇ 변경물량 단가 적용 기준

- 소 형 랙 : 소형랙(H515) 5대는 견적금액에 낙찰율(76.7%)를 적용하고소형랙(H515) 전원공급장치은 기존 계약단가를 적용

- POE단자함 : 관급자재 화상설비의 계약단가 적용

- 전원공급장치 : 기 계약단가 적용

□ 정거장별 물량변경내용

품 명	구분	규격	수 량
			BN1	BN2	BN3	BN4	BN5	BN6	계
통신랙	당초	19인치	2	2	2	2	2	3	13
	변경	19인치	1	1	1	1	1	1	6
		소형랙		1	1		1	2	5
		PoE함체	2						2
전원공급 장치	당초	DC 48V/21A (자립식)	1	2	1	1	1	1	7
	변경		2	5	2	1	2	3	15
	증감		1	3	1	-	1	2	8

□ 계약내역 증감내용

※단위:원(부가세 별도)

품 명	구 분	규 격	단 위	수량	재료비	노무비	경비	직접비 계
통신랙	당초	19인치	대	13	**********	*********	******	**********
	변경	19인치	대	6	*********	*******	******	*********
		소형랙(절체기)	대	5	*********	*******	*****	*********
		POE함체	대	2	*********	******	*****	*********
	합계							**********
	증감							**********
전원공급 장치	당초	DC 48V/21A (자립식)	대	7	*********	*********	******	*********
	변경		대	15	*********	*********	******	*********
	증감		대	8	*********	*********	******	*********

Ⅲ		검 토 의 견

□ 감리단 검토의견

ㅇ 터널비상방송 전원공급장치 물량산출 : 적정

- 터널비상방송 전원공급장치가 500m마다 설치하여야 하나 설계수량 부족으로 추가설치 필요

ㅇ 관제전화설비용 통신랙 규격 변경 : 적정

- 용역원대기실 및 운전취급실 등 기능실은 표준소형랙(H515)이 더 효율적이며 표준소형랙에 전원공급장치를 추가 설치

ㅇ 변경물량 계약단가 적용 : 적정

- 추가 설치물량 및 변경물량에 대한 계약단가 적용은 적정하며 계약금액 변경없이 시공하는 것이 타당함

□ 보고자 검토의견

ㅇ 터널비상방송 전원공급장치 물량산출 : 적정

- 당초 각 정거장에만 터널방송용 전원공급장치를 설치하였으나 터널방송증폭기(AMP)용 전원공급기를 구매사양에 맞게 추가설치하는 것이 타당함

※구매사양서 9. 연선전화기 터널비상방송 기능 및 성능

•증폭기 전원 공급은 500m까지 공급할 수 있어야 한다.

ㅇ 관제전화설비용 통신랙 규격 변경 : 적정

- 운영사무실 및 운전취급실 등 기능실에 설치되는 5개는 당초 19인치 통신랙보는 표준소형랙(H515)로 설치하는 것이 보다 효율적임

- 용역원대기실(BN1)용 랙은 공조실에 설치되는 통신랙 공동 사용

- 역무실(BN4)에 설치랙 대신 콘솔테이블을 이용하여 통신랙 미설치

- PSD기계실(BN1)에 승강장 비상전화용 L2스위치가 현장여건상 외부

노출되어 POE단자함체를 설치하여 보호하는 것이 타당함

ㅇ 변경물량 단가 적용 : 적정

- 표준소형랙(H515)는 견적금액에 관제전화설비의 구매낙찰율(76.7%)을

적용하고 전원공급장치(관제전화설비) 및 POE단자함체(화상설비)는 관급자재의 기계약단가로 적용하여 산출하는 것이 타당함

Ⅳ		행정사항

ㅇ 실정보고 조건부 승인 통보(도시철도설비부 → 감리단)

- 터널내 정거장간격이 500미터 초과구간에 터널방송용 증폭기용 전원공급장치 8대 추가 필요함

- 각 기능실에 설치되는 통신랙은 규격을 변경하거나 다른 통신랙을 공동이용 함으로써 효율적인 운영 가능

- 향후 계약내역 변경 등 물량변경 사항은 사후 정산시 반영

붙임 1. 현장조사결과(도면 등) 1부.

2. 관급자재(관제전화설비) 계약변경 내역서 1부.

3. 관련문서(실정보고)   1부.  끝.