문서번호	건축부-4431
결재일자	2023. 3. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	의료시설과장	건축부장		시설국장
이세나	차무흥	이형재		03/17
				안대희
협 조
	시설팀장		代김영덕
	주무관		이지원
	주무관		임형진

『은평병원 현대화사업(리모델링) 설계용역』

용역기간 연장 검토 보고

2023.03.

도시기반시설본부

(건축부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『은평병원 현대화사업(리모델링) 설계용역』

용역기간 연장 검토 보고

리모델링 설계용역 수행중 사업의뢰부서의 요구에 의한 '기존 건물 현황조사' 추가, 사용자 요구을 반영한 설계변경 등 과업범위가 확대되었기에 준공기한을 연장하고자 함

※ 준공기한 : '23.5.17. → '23.8.25. (증 100일)

□ 관 련 근 거

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장 계약일반조건 제8절2.계약기간의 연장

○ 「은평병원 현대화사업(리모델링)설계용역」용역연장에 관한 건(해마 제23-135호)

□ 사 업 개 요

○ 위   치 : 서울특별시 은평구 백련산로 90(은평병원)

○ 사업규모 : 지하1층, 지상 6층, 연면적 8,974㎡

※ 본관 : 지하 1,지상 6층 7,958㎡ / 어린이 발달센터 : 지상3층, 1,015㎡

****************************************************

*********************************************

○ 설계기간 : [총차]′22.9.20.~′23.5.17. / [1차]′22.9.20.~′23.5.2.

○ 설 계 자 : ㈜해마종합건축사사무소 외 5

□ 추 진 경 위

○ ′22.4.18. : 은평병원 리모델링 설계용역 추진계획(안)

○ ′22.6.10. : 설계공모 당선작 선정[(주)해마종합건축사사무소]

○ ′22.6.27. : 설계용역 계약 및 용역 추진 의뢰

○ ′22.9.19. : 은평병원 현대화사업(리모델링 설계용역) 체결

○ ′22.10.23.: 설계용역 착수보고회 개최

○ ′22.12.1. : 1차 설계자문위원회 개최

○ ′23.1.17. : 의뢰부서 주최, 과업범위 대비 부서별 별도 요구사항 관련 협의

***********

*******

****************************************************   ******

***************************************

***************************************************************    *******

*******

**********************************************************************************

************************

********************************************* ***********************************************************

*****************"

***********

**	****		**
	***	***
**	*************************	*************************	*******
**	************************	************************	*

*************

*******

***********************************************     ****************************************       ****************

******

********************************************* **********************

붙임  1.「은평병원 편대화사업(리모델링)설계용역 용역 연장 및 2차 계약에 관한 건 1부.

2. 용역기간 산정근거 및 예정공정표 각 1부.

3. 업무회의록(23.1.17./23.2.6.) 각 1부.

4. 용역(변경)계약서 1부.  끝.