문서번호	기반시설과-1726
결재일자	2023. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이준범		이병철	03/21
			김종호
협조

「한강공원 매점(난지1,2호)리모델링공사」

징크판넬 교체 실정보고 검토 보고

2023. 03.

한강사업본부

(기반시설과)

「한강공원 매점(난지 1,2호) 리모델링 공사」

징크판넬 교체 실정보고 검토 보고

당초 설계된 일부 징크판넬 교체에 대하여 신설 징크판넬과 육안상 차이가 있어 전체 교체를 시행하고자 실정보고 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 실정보고 검토(감리) 보고[아이씨디건축사무소-23-04('23.03.17.)호]

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 한강공원 매점(난지1,2호)리모델링 공사

□ 공사기간: 2022.11.14.~2023.04.10.

□ 도 급 비: 459,547,000원

□ 도 급 사: (주)하나건설이앤씨

□ 감 리 사: 주식회사 아이씨디플랜건축사사무소

Ⅲ		보 고 내 용

□ 당초 설계는 일부 징크판넬에 대해 교체 반영되었으나, 설계외 기존 징크판넬의 파손 및 부식정도가 심하고, 기존 징크판넬의 변색으로 신설 징크판넬과의 육안상 차이가 있음을 확인함.

□ 일부 교체시 미관 저해 및 안전사고 발생 위험이 있어 징크판넬 전면교체가 필요함

○ 부식 및 파손정도가 심해 교체 필요한 징크판 추가 확인

○ 기존 징크판넬의 변색으로 신설 징크판넬과 육안상 차이가 있음

기 존	신 설

※ 타 제품 및 색상 검토하였으나, 차이 있음

□ 단가 및 물량 검토

*****************

****************************

(㎡)

구분	당초(설계)	변경	증·감	비 고
***	***	******	*******
***	***	******	*******

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

***		**	**	***
***	****	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	************
	*	***********	***********	************

□ 감리 검토 의견

○ 미관저해 및 안전상 문제로 징크판넬 전체교체는 타당하며, 단가 및 물량 검토 결과 적정함.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 일부 징크판넬 교체시 미관을 저해시키고 안전사고 발생 위험이 있어 시민들에게 안전한 편의시설 제공을 위해 전체 교체는 타당하며, 감리의견과 같이 단가 및 물량 검토 결과 적정하다고 판단됨.

□ 추후 계약금액 조정시 공사 물량 및 단가, 금액을 확정코자함.

붙임  실정보고 검토 보고 각 1부.  끝.