문서번호	시설개선과-2439
결재일자	2023. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
박병규		03/21
		이균형
협조
	주무관		배성호

- 2023년 잠실야구장 환경개선공사 -

시공사 실정보고 검토 보고

2023. 3.

체육시설관리사업소

(시 설 개 선 과)

- 2023년 잠실야구장 환경개선공사 -

시공사 실정보고 검토보고

"2023년 잠실야구장 환경개선공사" 와 관련 야구장 관리본부 요청 및

현장 여건에 대한 시공사로부터 실정보고 사항이 접수되어 검토한 후, 계약금액 조정계획에 대한 보고 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 잠실야구장 환경개선공사

○ 공사개요

- 지붕층 난간설치 378m

- 3층 관람석 진입로 경사보수 466㎡

- 1루 105블럭 물고임 보수 1개소, 관람석 난간 재도장 678㎡

- 전광판 카메라 중계석 보수 1식

- 덕아웃 기자석 야구망 설치 2개소

○ 소요예산 : **************

- 도급비 : ******************

- 관급비 : **************************

○ 시 공 자 : ******************

○ 추진경위

- 2023. 1. 13. : 발주방침

- 2023. 1. 18. : 공사발주

- 2023. 2. 20. : 공사계약 및 착공

- 2023. 2. 27. : 잠실야구장 관리본부 의견 접수

- 2023. 3. 17. : 시공사 실정보고

□ 시공사 실정보고 내용 및 검토

○ 관리본부 요청사항(잠운본 2023-2023.2.27.) 및 품질향상 반영

연번	내 용	사 유	현황사진	검토내용	비 고
1	덕아웃 그물망 위치변경 설치	실사용자 의견 반영		사용자측 의견 반영코자 함	*** *****
2	중앙로비 공간 확충	관람객 안전 확보		관람객 안전 확보를 위해 반영코자 함	******* **
3	관람석 난간 방청 페인트 소재변경	품질 향상		품질향상(접착력 확보)및 예산절감 위해 반영코자 함	****** **
4	3층 진입로 그레이팅 교체(추가)	그레이팅 노후		현장여건에 따라 품질 확보를 위해 반영코자 함	****** **
계					* ********

□ 검토의견

○ 실정보고 내용 승인조치

- 관람객 안전확보 및 공사의 목적을 달성하고 품질향상을 위하여

승인조치하여 안전사고 방지 및 쾌적한 환경을 제공코자 함.

□ 계약금액 조정

○ 총공사비 증․감 내역

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		*******	*******	******
도급비	공 급 가 액	*******	*******	******
	부가 가치세	******	******	*****
	계	*******	*******	******
관급자재비		******	******	**	할인

□ 조치의견

○ 위와 같이 시공사의 실정보고를 검토한 결과 타당하여 승인 조치하고, 추후 계약금액 조정에 반영코자 함.

○ 계약변경에 따른 추가 공사비는 본 예산의 낙찰차액을 활용하고자 함.

붙임  : 1. 야구장 관리본부 요청공문 및 시공사 실정보고서 각 1부.

2. 변경내역서 및 도면 각 1부.  끝.