문서번호	기반시설과-1727
결재일자	2023. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이준범		이병철	03/21
			김종호
협조

「한강공원 매점(난지1,2호)리모델링공사」

물량 정산 실정보고 검토 보고

2023. 03.

한강사업본부

(기반시설과)

「한강공원 매점(난지 1,2호) 리모델링 공사」

물량 정산 실정보고 검토 보고

당초 설계와 현장여건이 다름(누락 및 추가 반영)에 따른 물량정산을 위한 실정보고 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 실정보고(4차) 검토(감리) 보고[아이씨디건축사무소-23-05('23.03.21.)호]

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 한강공원 매점(난지1,2호)리모델링 공사

□ 공사기간: 2022.11.14.~2023.04.10.

□ 도 급 비: 459,547,000원

□ 도 급 사: (주)하나건설이앤씨

□ 감 리 사: 주식회사 아이씨디플랜건축사사무소

Ⅲ		보 고 내 용

□ 당초 설계와 현장여건이 상이함에 따른 물량정산 보고

구 분	품목	당초	변경	변경사유	증·감	비고
1	**************	*	******** ********	*************************	**********
2	***	*	******* *******	******************	********
3	******	*******	*******	*********	**********
4	*********	*	********************	*********************	**********
5	*******	*************	****	********************	**********
6	**********	*	*******	*********	**********
7	********	*	******* *******	***********	********
8	*********	**	*	*************	***********
9	*****	******* *******	******* ********	*****************	***********
10	*****	*******	*	********	*********
11	****	*	*******	************	**********
12	****	*********	*	***	***********
13	****	**** *******	******** ********	******************	********
	*				**********
	***				**********
	***				***********

□ 단가 적용 검토

**********************

*******************************************

******************************

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

***		**	**	***
***	****	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	**********
	*	***********	***********	***********

□ 감리 검토 의견

○ 실정보고 사유는 부력체 안전점검 용역에 따라 타당하며, 단가 및 물량 검토 결과 적정함.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 설계와 현장여건 상이 및 일부 누락에 대하여 물량 정산은 타당하며, 감리의견과 같이 단가 및 물량 검토 결과 적정하다고 판단됨.

□ 추후 계약금액 조정시 공사 물량 및 단가, 금액을 확정코자함.

붙임  실정보고 검토 보고 각1부.  끝.