아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공사 일시중지에 따른 공사기간 조정 알림)

1.업무지시현장 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)건설공사 2공구 주식회사 한

국종합기술

2.작 성 일 자 : 2023-03-21 17:03:09

3.지 시 내 용

가. 방재시설부-2825(2023.3.13.)와 관련입니다.

나. 우리 시(본부)와 귀 사간 계약체결되어 추진중인 「국회대로 도로다이어트구간 조성공사」에 대하여 귀 사와 공사기간 조정 협의된 사항을 통보하오니 관련  후속사항을 이행하여 주시기 바랍니다.

○ 공사 일시중지에 따른 공사기간 조정내용

구분	전 체 분		금차분(1차)		비고
	기 간	일 수	기 간	일 수
당초	'22.12.23.~'24.06.30.(556일)	556일	'22.12.23.~'23.12.30.(373일)	373일
변경	'22.12.23.~'23.02.28.(68일) '23.03.01.~'23.08.30.(공사중지) '23.09.01.~'24.12.31.(488일)	556일 (증감없음)	'22.12.23.~'23.02.28.(68일) '23.03.01.~'23.08.30.(공사중지) '23.09.01.~'23.12.31.(121일)	189일 (감184일)

※ 한전 지중화공사 추진일정에 따라 조기 재착공 등 공사기간 조정될 수 있음

○ 사유 : 선행사업인 한전 지중화공사의 기존 가공선로 간섭 등 장애요인 해소 후 재착공

붙임  공사중지 계획 보고서 1부.  끝.

주무관	이규대		방재시설과장	03/21
정현중
협조자	주무관	김광호
시행	방재시설부-3232	(	2023. 3. 21.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2415	/전송	02-6438-8756	/	aircraft2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)