등록번호	도로시설과-11624		주무관		보도관리팀장		도로시설과장		안전건설교통국장
			남윤수		이은주		어원철		03/21
결재일자	2023. 3. 21.
									정욱성
공개구분	부분공개(5)
			협 조
「동호로5길 외 1개소 보도정비공사」추진계획 보고
안전건설교통국 도 로 시 설 과

「동호로5길 외 1개소 보도정비공사」 추진계획 보고

동호로5길 보행환경 개선 및 마장로3 일대 보도침하 구간 재정비 건을 통합 발주하여 신속하고 효율적인 공사 시행을 위한 「동호로5길 외 1개소 보도정비공사」추진계획을 보고 드림

Ⅰ		관련 근거

「동호로5길 보행환경 개선공사」추진계획 보고[도로시설과-10526(22.09.27.)]

‘23년 보행환경개선사업 예산 재배정[서울시 보행자전거과-1437(23.02.01.)]

‘22년도 재난안전관리 특별교부세 교부[기획조정과-14957(22.12.26.)]

Ⅱ		현황 및 문제점

동호로5길 보행환경 개선공사

ㅇ 동호로5길은 보도블록 노후, 파손으로 상태가 불량하여 정비를 요청하는 민원이 제기되고 있으며, 남산타운 아파트 방향 보도는 도로폭이 협소하여 주민 통행 불편 및 안전 사고가 우려되고 있는 구간임.

ㅇ 본 구간의 안전하고 쾌적한 보행환경 조성을 위해 동호로5길 보행환경 개선사업 실시설계 용역을 기 완료함.

마장로 3 일대 보도침하 복구

ㅇ 마장로3 앞 보도는‘22년 6월 집중호우로 인해 보도 침하가 발생하여 부분 구간 보수한 상태로 추가적인 보도침하가 우려되고 있음.

ㅇ ‘22년12월 재난안전 특별교부세가 연말에 교부되어 당해 연도 사업시행이 불가하여 사고이월하였음.

Ⅲ		공사 개요

공 사 명 : 동호로5길 외 1개소 보도정비공사

공사기간 : 착공일로부터 120일간

위    치 : 중구 다산로 32 및 마장로 3 일대

공사규모

ㅇ 동호로5길 보행환경개선 : 블록포장 11.79a, 아스콘포장 22.8a

ㅇ 마장로3 일대 보도 재정비 : 판석포장 7a

총공사비 : 1,100백만원(구비 325 시비 475 특별교부세 300)

예산과목

ㅇ 도로시설과, 도시기반시설 확충, 도로유지 관리, 동호로5길 보행환경 개선공사, 시설비 및 부대비, 시설비(구비) : 325백만원

ㅇ 보행자전거과, 보행환경 개선 및 자전거이용 활성화, 보행환경 개선(교통관리계정), 보행환경개선지구 조성(전환사업), 시설비 및 부대비, 시설비(시비) : 475백만원

ㅇ 도로시설과, 도시기반시설 확충, 도로유지 관리, 보도유지보수공사(연간단가), 시설비 및 부대비, 시설비(특별교부세) : 300백만원

Ⅳ		그간 추진현황

2021. 10. : 교통규제심의 완료

2021. 11. : 기본 및 실시설계 완료

2022.  7. : ‘23년 보행환경개선사업 공모 신청

2022. 12. : ‘22년 하반기 재난안전 특별교부세 교부(사고이월)

2023.  2. : ‘23년 보행환경개선사업 예산 재배정

Ⅴ		검 토 의 견

상기와 같이 금년 상반기 내 신속하고 효율적인 보도정비 사업 완료를 위해 동호로5길 보행환경 개선 및 마장로3 일대 보도정비를 통합 발주하고자 하며,

아울러, 「동호로5길 보행환경개선공사」및 「마장로3 일대 보도 재정비 공사」병행 추진에 따른 건설폐기물 처리용역을 통합 발주 시행하고자 함.

ㅇ 건설폐기물 처리용역 개요

- 폐기물 운반 : 756㎥

- 폐기물 처리 : 폐콘크리트 723ton, 폐아스콘 1,037ton

- 소요예산 : 74,500천원

Ⅵ		향 후 계 획

2023. 3. : 공사 및 용역 발주

2023. 4. ~ 7. : 착공 및 시행

붙임 : 위치도 및 현장사진 각 1부.  끝.