문서번호	설비부-4310
결재일자	2023. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
이상록		곽용길	03/22
			신용휴
협조

『서울 사진미술관 건립 기계공사』승객용 엘리베이터 구매내역 변경보고

『서울 사진미술관 건립 기계공사』

승객용 엘리베이터 구매내역 변경보고

2023.  3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울 사진미술관 건립 기계공사』

승객용 엘리베이터 구매내역 변경보고

「서울 사진미술관 건립 기계공사」와 관련하여, 승객용 엘리베이터의 주행안정성 확보를 위한 자재(중간빔)를 추가하여 구매하고자 함.

Ⅰ		변경사유

ㅇ (감리단)승객용 엘리베이터 중간빔 포함 발주요청(KDU제23-74호,2023.3.20)

- 엘리베이터 2대의 설치공간 사이에 격벽이 미설치되어 엘리베이터(카)의 주행레일 설치불가

Ⅱ		조치계획

ㅇ 엘리베이터 설치에 필요부품이므로, 조달구매시 중간빔 포함하여 발주

- 엘리베이터 본체 구매시, 추가품목(에어컨, 방화도어, 중간빔 등)을 옵션으로 추가선택하여 구매가능

****************************

****************************************************

************************

*******************************************

************************************

ㅇ 예산과목

- 문화본부 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 서울사진미술관건립, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 감리단 발주요청 공문 1부.  끝.