문서번호	기전과-2728
결재일자	2023. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이건용		채충일	03/22
			차창훈
협 조
	주무관			이정호

준공기한 연기 검토 보고

[호암2터널 보행환경 개선 전기공사(서울시 구간)]

2023. 03. 22.(수)

남부도로사업소

(기전과)

[호암2터널 보행환경 개선 전기공사(서울시 구간)] 준공기한 연기 검토 보고

「호암2터널 보행환경 개선 전기공사(서울시 구간)」의 준공기한 연기 사유가 발생하여, 이에 계약변경을 실시하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명 : 호암2터널 보행환경 개선 전기공사(서울시 구간)

ㅇ 공사기간 : 2022. 08. 08. ~ 2023. 03. 30.

ㅇ 공사규모 : 보행등, CCTV, 유인휀 설치

ㅇ 계약금액 : *************

ㅇ 계약업체 : *******************

□ 준공기한 연기 검토 보고 내용

ㅇ 사유 : *****************************

************************************************

ㅇ 요청 내용

업체명	변경 전	변경 후
*********	***********************	***********************

ㅇ 연기에 따른 귀책 소재 : 서울특별시

ㅇ 지체상금 부과 여부 : 미부과

□ 보고자 검토 의견

ㅇ *********************************************************************

□ 향후 계획

ㅇ 2023. 03. : 계약변경 의뢰

ㅇ 2023. 06. : 공사 준공

붙임 1. 준공기한 연기 검토보고(토목_서울시 구간) 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.