문서번호	도시철도토목부-3479
결재일자	2023. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		박형복	03/23
			류용열
협 조
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

6차 공사 발주계획 검토 보고

2023.  3.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

6차 공사 발주계획 검토 보고

「진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구 건설공사」 관련 책임건설사업관리기술자로부터 6차 공사발주 요청이 있어 이에 대해 검토보고 드림.

※ 관련서류 : 동기공 제2023-1651호(’23.03.22)

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

ㅇ 공사금액 : **********

ㅇ 공사기간 : ’18.12.31.∼ ’24.10.29.

ㅇ 규    모 : 인입선(L=5,556m), 차량기지 113m

ㅇ 감 리 사 : ㈜동명기술공단 외 4개사

ㅇ 도 급 자 : ㈜케이씨씨건설

ㅇ 계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계 약 기 간	계 약 금 액	비 고
총 괄	2018.12.31 ~ 2024.10.29	*******
1차	2018.12.31 ~ 2020.08.31	*****	준 공
2차	2020.07.01 ~ 2021.02.28	*****	준 공
3차	2021.02.22 ~ 2021.12.31	******	준 공
4차	2022.01.01 ~ 2022.12.31	******	준 공
5차	2022.11.01 ~ 2023.03.31	*****	진행중
6차	2023.04.01 ~ 2023.12.31	******	금회발주
장 래	-	******

□ 보고내용

ㅇ 공사기간 : 2023.04.01 ~ 2023.12.31

ㅇ 발주금액 : 17,000백만원

- 공종별 공사금액

(단위:천원)

구 분	총 괄	계 약 금 액			잔 여
		기발주(1-5차)	금회(6차)	소 계
1. 터널	***********	***********	**********	***********	***********
1.1 단선터널	***********	***********	**********	***********	**********
1.2 확폭터널	**********	********	**	********	********
1.3 수직구 및 횡갱	**********	**********	*******	**********	**********
1.4 복선터널	***********	***********	**********	***********	**********
1.5 중간신호실#2	*******	*******	**	*******	*******
1.6 경사갱	**********	**********	********	**********	**********
1.7 인입선 종점부	********	********	*******	********	********
1.8 터널부대공	**********	**********	**********	**********	**********
2. 개착환기구	**********	******	**	******	**********
3. 수직구가시설	********	********	**	********	*******
4. 가설공	**********	**********	********	**********	**********
5. 부대공	**********	********	********	********	********
6. 차량기지	**********	**********	*******	**********	**********
직접공사비 계	***********	***********	***********	***********	***********
간접공사비	***********	***********	**********	***********	**********
미확정설계공종(PS)	*********	***********	*******	***********	********
물가변동비(K1~K6)	***********	**********	**********	**********	**********
총공사금액	************	***********	***********	***********	***********

- 6차공사 발주물량

(단위:백만원)

구 분		공 종	단위	총물량	발주물량			잔 여	공사비 (백만원)
					기발주 (1-5차)	금회 (6차)	소 계
총 계									*******
터널공사	단선터널	굴착 및 보강	m	1,459	1,411	48	1,459		******
		라이닝		1,499		270	270	1,229
	확폭터널	굴착 및 보강	m	121	121		121		*
	수직구/횡갱	굴착 및 보강	m	142	142		142		***
	복선터널	굴착 및 보강	m	3,976	3,513	464	3,976		******
		라이닝	m	3,976	312	1,956	2,268	1,708
	경사갱	굴착 및 보강	m	385	385		385		****
		부대터널 라이닝		1		0.75	0.75	0.25
	인입선 종점부	갱구부 토공 외	식	1	0.55	0.17	0.72	0.28	***
	터널부대공	공사중 설비, 계측	식	1	0.62	0.14	0.77	0.24	******
가설공		가설건물 등	식	1	0.64	0.10	0.74	0.26	****
부대공 외		터널부지임대료 등	식	1	0.53	0.14	0.66	0.34	****
차량기지		토공 및 구조물	식	1	0.39	0.02	0.40	0.60	***
제경비 외			식	1	0.43	0.19	0.62	0.38	******

- 6차공사 개요 및 주요물량

(단위:백만원)

구 분		세 부 내 용			비 고
		내 용	물 량	금액
터널	단선터널	- 굴착(하선) - 숏크리트 타설(하선) - 락볼트(L=3.0m, 하선) - 강관다단보강(하선) - 라이닝 콘크리트 타설(상‧하선) - 터널방수시트	1,979㎥ 267㎥ 476개 60공 2,901㎥ 27,719㎡	*****
	수직구	- 인력리스트 운영	0.090식	**
	복선터널	- 굴착 - 숏크리트 타설 - 락볼트(L=3.0~4.0m) - 라이닝 콘크리트 타설 - 터널방수시트	33,322㎥ 1,682㎥ 1,043개 17,191㎥ 35,829㎡	*****
	경사갱	- 갱구 비탈면 보호공 - 중간신호실#1 라이닝 타설	697㎡ 137㎥	***
	인입선종점부	- 갱구 비탈면, 사면 보호공	1식	**
	터널부대공	- 공사중 기계·전기설비 외	1식	*****
	소 계			*****
가설 및 부대공		- 가설사무실, 환경관리비 외	1식	***
차 량 기 지		- 초기우수처리시설	1식	**
직접공사비				******
제 경 비				*****
P.S공종		- 스마트송장, 발생암 매각대금 외		**
물가변동비		- K1 ~ K6		*****
계				******

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 시공사에서 제출한 6차공사 발주 내역서를 검토한 결과 적정하게 작성된 것으로 판단됨.

□ 조치계획

ㅇ 건설사업관리단 검토의견과 같이 6차공사에 대해 아래와 같이 발주시행 처리코져 함.

(단위 : 백만원)

구 분	계 약 기 간	계 약 금 액	비 고
6차	2023.04.01 ~ 2023.12.31	******

* 예산과목 : 도시철도건설, 도시철도건설사업, 진접선(4호선연장) 차량기지건설, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 발주서류 1식.  끝.