문서번호	공원운영과-4552
결재일자	2023. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원운영팀장	공원운영과장
이선영		정영미	03/23
			이인수
협조

장충자락 게이트볼장 등 정비공사

준공기한 연기 검토보고

2022. 11.

중부공원여가센터

(공원운영과)

「장충자락 게이트볼장 등 정비공사」

준공기한 연장 검토보고

장충자락 게이트볼장 등 정비공사 시행 중 민원발생에 따라 공사 일정이 지연되어 준공기한 연장을 아래와 같이 검토하고 보고합니다.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 장충자락 게이트볼장 등 정비공사

ㅇ 위    치 : 남산공원 장충자락 등 [중구 장충동2가 197]

ㅇ 도 급 사 :*************************************

ㅇ 도 급 비 :***************************

ㅇ 공사내용 :*****************************

ㅇ 공사기간 : 2023.2.27. ~ 2023.3.26.

□ 준공기한 변경

구분	당 초	변 경	연장 일수
준공기한 연장	2023.2.27.~2023.3.26	2023.2.27.~2023.4.15.	20일

□ 준공기한 연기 사유

○ 귀책 소재 : 중부공원여가센터

○ 지연배상금 부과 여부 : 미부과

- ********************************************************.

□ 향후계획

○ 상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

끝.